[붙임 1]

주요 도시폭우 위험지역에 대한 강우 시나리오 선정 기준 및 도시 침수해석 간소화 기법 개발

- 시행계획서 -

2016. 2

1. 본 과제 개요

-  -

◦ 과 제 명 : 도시 침수지역 및 영향권 분석을 위한 정부 재난안전 정책지원 시스템 구현(Ⅰ)

◦ 과업기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.

◦ 주요 연구내용

- 도시폭우에 부합하는 위험저감 도시계획, 영향권 (zoning) 등의 개념체계 정립

- 전국의 도시폭우 중점관리 대상지 및 공간범위 설정

- 도시폭우 재해예방을 위한 대책의 가용자원 유형화 및 적용특성 조사

중점관리 대상지별 위험도의 상세 공간정보 구축

위험도 지도를 이용한 도시침수 공간구조 대책 수립 지원 방안 제시

2. 위탁용역 개요

๐ 용 역 명 : 주요 도시폭우 위험지역에 대한 강우 시나리오 선정 기준 및 도시             침수해석 간소화 기법 개발

๐ 용역목적

- 도시 침수에 대한 중점관리대상지 선정을 위한 기준 제시

- 중점관리대상지별 강우 시나리오의 기준설정 및 방법론 제시

- 중점관리대상지 폭우 시나리오에 따른 침수해석 프로토타입 개발

๐ 용 역 비 : 일금 팔천만원  (￦80,000,000)(VAT포함)이내

๐ 용역기간 : 계약일 ~ 2016.12.31

๐ 시행방법 : 공개경쟁입찰

- 국토연구원 「위탁연구사업규칙」에 의거 협상에 의한 계약

๐ 수행방법

- 과업지시서에 의거하여 수행하여야 하며, 과업지시서에 명시되지 않는 사항이라도 과업목적을 위해 필요한 사항은 발주기관과 협의하여 시행하여야 함

3. 위탁용역의 주요 내용

□ 도시 침수에 대한 중점관리대상지 선정을 위한 기준 제시

๐ 도시 침수 중점관리대상지 선정 기준 마련

- 도시 폭우 중점관리 대상지를 침수발생특성과 침수피해 민감성이 높은 지역을 우선적으로 선정할 수 있는 기준 제시

- 제시된 기준에 따라 중점관리대상지를 선정할 수 있도록 전국 단위의 자료 수집

□ 중점관리대상지별 강우 시나리오의 기준설정 및 방법론 제시

๐ 기후변화의 영향을 고려한 기후변화 시나리오 생성

- 중점관리대상지별 기후변화의 영향을 고려한 중장기 기후변화 시나리오 분석 및 자료의 검증

- 적정 시나리오 선택 기준 설정 및 적정 시나리오 선택

๐ 강우 시나리오의 시계열 자료 생성을 위한 기법 개발

- 기후변화 시나리오 자료의 일단위에서 시간단위 시계열 자료의 상세화 기법 개발

* 특히, 극치강우에 대한 관측값이 가지는 지속시간별 (예, 1, 2, 3, 5, 6,      8, 12, 24) 극치강우의 통계학적 특성 반영)

- 월자료 또는 일단위 자료로부터 시간단위 강우자료 생성

- 중점대상지에 대한 500m×500m 이내의 공간 상세화된 자료를 제공할 수 있도록 새로운 공간상세화 기법 개발

- 중점관리대상지에 대한 생성된 자료의 분석 및 검증

- 중점관리대상지의 상세화된 시간 단위 강우로부터 다양한 빈도별 확률강우량 산정

- 확률강우량 변화 추이 분석

중점관리대상지별 목표강우 설정 및 도심지대책□수방시설대책 분담 전략제시

□ 중점관리대상지 폭우 시나리오에 따른 침수해석 프로토타입 개발

๐ 중점관리대상지 침수해석 간소화 방법론 개발

- 도시계획 공간단위의 침수해석 모형 간 간소화 방법론 정립

- 중점관리대상지별 매개변수 최적화 및 검증

๐ 중점관리대상지 폭우 시나리오별 홍수량 및 홍수위 분석

- 중점관리대상지 폭우 시나리오별 홍수량 및 홍수위 분석

중점관리대상지 가상홍수 시나리오별 침수 및 범람지역 분석

๐ 도시계획 공간단위 침수해석 프로토타입 개발

- 중점관리대상지 침수해석 매뉴얼 시안 개발

- 도시계획 중점관리대상지 침수해석 프로토타입 개발

□ 연구성과물

๐ 결 과 물 :

- 보고서 3부(A4), 원본파일을 수록한 CD 1부 제출

- 침수해석 매뉴얼 시안 제출

- SCI급 논문 2편 이상 제출

(최소 1편이상은 Acceptance Letter를 과업기간 내에 받을 것)

๐ 제출양식 : 원고형태 및 파일로 제출

4. 향후 추진일정(안)

◦ 2016.2.25(목) 연구원 홈페이지 공고(12일간)

◦ 2016.3.7(월) 제안서 접수마감

◦ 2016.3.10(목) 제안서 평가 및 위탁자 선정

◦ 협상 후 계약체결

※ 상기 일정은 연구원 사정에 의해 변경될 수 있음