붙임 1

새마을 운동 테마공원 조성 기본계획 수립을 위한 기초조사 및 지원 용역

(기술부문)

- 과업지시서 -

2011. 6

목        차

I. 과업의 개요	1

1. 과업명	1

2. 과업의 목적	1

3. 과업의 범위	1

4. 과업기간 및 용역비	1

II. 과업의 주요내용	2

1. 사업구역의 설정	2

2. 도입프로그램 및 체험학습 개발 관련자료 제공	2

3. 기본구상 및 계획 지원	2

III. 과업수행지침	5

1. 일반지침	5

2. 자료적용	6

3. 설계변경 및 용역중지 등	7

4. 보안사항	7

5. 기타사항	8

IV. 보고 및 성과품	9

1. 보고	9

2. 보고서 작성 기준	9

3. 성과품 제출	10

Ⅴ. 과업추진 일정	10

1. 예정공정표	10

I. 과업의 개요

1. 과업명

◦ 새마을 운동 테마공원 조성 기본계획 수립을 위한 기초조사 및 지원 용역

2. 과업의 목적

◦ 본 과업은 구미시 상모사곡동 일원에 새마을운동 테마공원 조성을 위한 기본계획 수립을 위한 기초조사 및 지원을 목적으로 함

3. 과업의 범위

1) 공간적 범위

◦ 경북 구미시 상모·사곡동 일원 (면적 : 약 265,553㎡)

2) 내용적 범위

◦ 사업구역 설정

◦ 도입프로그램 및 체험학습계획 개발 관련자료 제공

◦ 공원조성계획 및 지원

4. 과업기간 및 용역비

◦ 본 과업의 수행기간은 계약일로부터 5개월

◦ 추정용역비 : 6천4백만 원 정(부가세 포함)

Ⅱ. 과업의 주요내용

1. 사업구역의 설정

◦ 예비타당성검토를 받을 당시 개략적으로 설정된 구역이 있기는 하나 확정되지는 않음

◦ 따라서 우선 공원에 포함될 경계를 주변여건을 조사하여 지장물, 공시지가 등을 고려하여 설정하여야 함

- 2 ~ 3개정도의 대안을 검토하여 가장 최적안을 설정

2. 도입프로그램 및 체험학습 개발 관련자료 제공

◦ 해당 사업부지내에 도입될 프로그램 및 체험학습 프로그램을 개발할 수 있도록 관련 자료 제공

◦ 이미 청도와 기계가 새마을운동의 본산지라고 인식되고 있으므로 이들과 차별될 수 있는 프로그램을 개발해야 하므로 청도와 기계의 공원조성 사례와 기타 국내외 본 사업에서 참고가 될 만한 사례 조사하여 반영

3. 기본구상 및 계획 지원

1) 현황조사

◦ 대상지와 대상지가 속한 구미시 및 주변여건에 대한 현황조사

- 자연환경, 인문환경, 교통, 상위 및 관련계획 등

◦ 특히 관광환경을 면밀히 조사하고 인근 및 광역적인 관광시장조사 실시

2) 상위계획 및 관련법규

◦ 구미시 도시기본계획 및 관리계획, 도시공원녹지기본계획 등 관련계획 및 법규분석

◦ 관련법규 분석을 통해 본 대상지의 적합한 도시계획시설 설정과 조성방안 등 제시

3) 기본구상 및 계획

◦ 연구원에서 제시한 도입기능, 도입시설, 규모, 구상의 기본방향 등 지표에 따라 개발구상안 및 계획수립

※ 연구원에서 개략적인 드래프트 안 제시

4) 기타 부문계획

◦ 토지이용계획

- 도시공원시설을 고려한 토지이용계획을 수립하고 도시공원시설별 면적 산출

◦ 교통동선계획

- 대상지와의 연결을 위한 교통계획 및 대상지 동선계획 수립

◦ 시설물배치계획

- 이용수요를 고려하여 도입시설물의 규모를 결정하여 도입시설물의 배치계획을 수립하고 규모 및 수량 산출

◦ 조경계획

- 관련법규를 고려하여 조경면적을 결정하고 포장, 식재 등 조경계획 수립

◦ 공급처리시설계획

- 상하수도, 전력통신, 에너지, 폐기물처리에 대한 수요와 개략적 처리계획 수립

◦ 건축계획

- 주요건축물에 대한 배치 및 건축계획(규모, 구조, 형태, 부대시설, 용적율, 건폐율, 수용인구 등)을 개략적으로 제시

Ⅲ. 과업수행지침

1. 일반지침

◦ 본 과업은 『새마을운동 테마공원 조성 기본계획 연구』의 부분과업으로 본 과업의 수행은 전체과업의 추진내용에 따라 일관성 있게 추진되고 진행되어야 한다.

◦ 본 과업수행지침은『새마을운동 테마공원 조성 기본계획 연구』용역과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 이에 명시되지 아니한 사항은 발주기관과 협의하여 시행한다.

◦ 본 과업수행에 참여하는 연구진은 관계분야에 대한 전문적 지식과 경험이 풍부한 자로 구성하여 합리적이고 효율적으로 과업이 수행될 수 있도록 한다.

◦ 과업수행계획서에서 참여하기로 한 당초 과업책임자 및 참여자는 본 과업 완료시까지 원칙적으로 변경할 수 없다. 다만, 변경이 불가피할 경우에는 당초 과업책임자 및 참여자와 동등하거나 그 이상인 자로서 발주처의 사전승인을 득하여야 한다.

◦ 과업수행자는 발주기관의 요청이 있을 경우 공청회, 연구협의회, 각종 회의 등에 참석하여야 한다.

◦ 과업수행 중 부득이한 사유로 당초 공정대로 용역시행이 어려울 때에는 발주기관과 협의하여야 하며, 그 사유가 타당하다고 발주기관이 인정하는 때에는 과업내용과 기간을 조정할 수 있다.

◦ 과업수행자는 계약서에 명시된 이외의 기관에게 과업내용을 하도급 할 수 없다. 다만 부득이한 경우에는 발주처와 협의하여 시행한다.

◦ 과업수행자는 본 과업을 효율적, 체계적으로 추진하기 위하여 전문가들로 구성된 연구자문회의 또는 연구협의회를 개최하여야 한다.

◦ 과업수행시 세부과업내용, 추진일정 및 추진방법 등에 대하여 발주처와 사전에 긴밀히 협의한 후 수행하여야 한다.

◦ 본 용역 완료 후에라도 성과품의 보완 및 관련 자료 작성지원 등이 필요한 경우 과업수행자는 이를 수행하여야 하며, 과업수행 중 감사로 인한 처분결정 등이 있을 시는 이에 따라야 한다.

◦ 본 과업은 계약즉시 과업에 착수하여야 하며, 계약체결 후 7일 이내에 착수계를 제출하고, 1개월 이내에 과업수행계획을 포함한 착수보고서를 제출하여야 한다.

◦ 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 경미한 사항은 수급자가 수행하도록 한다.

◦ 본 과업의 수행시 자료수집 등 행정지원이 필요할 경우에는 발주기관과 협의하여 추진한다.

◦ 경비항목에 대해서는 실제 투입한 결과에 따라 예산범위 내에서 정산할 수 있다.

2. 자료적용

◦ 통계자료는 그 근거가 명확하고 객관적으로 인정되는 것을 적용하여야 하며 자료의 출처를 기재한다.

◦ 본 과업의 기준연도는 2010년으로 하며 2010년 자료획득이 불가능할 경우에는 가장 최근의 자료를 이용한다.

◦ 장래지표는 정부공식 자료가 있는 경우 이를 적용하며 기타는 정부기관의 잠정자료, 당해 부문 전문기관의 자료 순으로 적용하고 자료가 없는 경우에는 별도 조사하여 발주기관과 협의‧결정한다.

◦ 본 과업에서 사용하는 모든 자료는 전산처리를 원칙으로 하고, 관계자료 및 산출근거 등을 제시하여야 한다.

3. 설계변경 및 용역중지 등

◦ 과업기간 중 발주처의 사정으로 인하여 과업의 내용(과업범위, 과업기간 등)이 변경되거나 불가항력으로 업무수행이 불가능한 경우에는 상호 협의하여 설계를 변경할 수 있다.

◦ 수급자의 귀착사유가 아닌 중대한 사유로 용역의 계속적인 추진이 불가하다고 판단될 경우 발주처는 수급자와 합의 후 용역중지 또는 타절 준공을 할 수 있다.

4. 보안사항

◦ 과업수행자의 대표자는 본 연구원에서 규정하는 소정의 서식에 의거 자필로 서명한 보안각서를 제출하고, 과업참여자에 대하여도 같은 방법으로 대표자의 책임 하에 보안각서를 징구하여 과업 착수와 동시에 제출하여야 한다.

◦ 과업성과품은 발주처과 협의하여 내용의 중요도에 따라 비밀 또는 대외비로 분류‧관리하여야 하며, 인쇄 시에는 정부 비밀 취급이 인가된 업체에서 인쇄하는 등 보안 관계 제규정을 준수하여야 한다.

◦ 과업의 내용이 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 가능성이 있는 성과품 작업 시에는 참여 인원을 최소화하되 정규 직원에 한하여 업무를 수행하게 해야 한다.

◦ 모든 관계서류와 자료들을 본 과업이외의 목적을 위하여 사용하지 않으며, 발주처의 사전 서면동의 없이 타인에게 제공하거나 대여하지 않는다.

◦ 과업 참여자가 교체될 시에는 인수‧인계를 철저히 하고 발주처의 확인을 받고 보안각서를 제출하여야 한다.

◦ 과업수행자는 과업수행 과정에서 발생한 각종자료와 용역성과품을 용역준공시 전부 납품토록 하고, 성과품을 추가로 인쇄하여 보관할 수 없다.

◦ 본 과업은 정부의 보안관계 법규에서 정하는 바에 따라 수행하여야 하며, 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여는 책임을 져야 한다.

5. 기타사항

◦ 본 과업지시서의 용어 해석상에 차이가 있을 경우에는 발주처와 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

◦ 기타 사항은 관계규정이 정하는 바에 따라 발주처와 협의 조정하되, 조정이 되지 않을 경우 발주처의 지시를 따르도록 한다.

Ⅳ. 보고 및 성과품

1. 보고

구분	제출시기	비고
착수보고	과업수행계획 내용을 정리하여 계약 후 1개월 이내에 보고 및 검토
중간보고	계약 후 5개월 이내에 과업의 중간연구결과를 보고 및 검토
최종보고	과업의 최종연구결과를 작성하여 과업종료 20일 이전에 보고 및 검토
공정보고	본 과업의 현재 추진공정 및 향후계획을 구체적으로 작성하여 매월 첫째 수요일에 서면 또는 직접 제출
수시보고	본 과업의 추진상황이나 연구결과에 대하여 발주기관의 요구가 있을 때에는 수시로 보고 과업수행일정상 보고회 일정이 있을 때에는 1주전에 별도로 보고

2. 보고서 작성 기준

◦ 모든 성과품의 작성은 사전에 발주기관과 협의하여 작성하여야 한다.

◦ 용어는 한글 사용을 원칙으로 하되, 전문용어 뜻이 혼동되거나 불명확한 경우에는 영어, 한자 등을 병기할 수 있다.

◦ 보고서 크기는 A4로 하며, 한글 97 사용, CD에 수록되는 도면은 칼라로 작성한다.

◦ 인쇄는 전산작업하여 인쇄하고, 도면은 칼라복사로 한다. 표지, 인쇄양식 등은 발주처와 협의하여 결정한다.

3. 성과품 제출

◦ 과업 성과품 및 규격, 수량

구분	제출시기	부수	비고
착수보고서	착수일로부터 1개월 이내	5부	50면 내외
중간보고서	착수일로부터 5개월 이내	5부	100면 내외
최종보고서	과업종료전 10일 이내	10부	300면 내외
마스터플랜 도면	1식		보고용 판넬제작 등
현황조사 자료 및 도면	1식

◦ 착수보고시부터 최종보고시까지의 모든 내용은 디지털 매체(예: CD, DVD 등)에 수록하여 2매 제출

Ⅴ. 과업추진 일정

1. 예정 공정표

기간(월) 세부내용	1M	2M	3M	4M	5M	비고
∙사업구역의 설정
∙도입프로그램 및 체험학습 개발 관련자료 제공
∙기본구상 및 계획 지원
∙각종 도면 작성
∙보고회		•			•	2회
∙실무협의회	•		•		•	3회