<붙임 2> 위탁용역 과업지시서

『민·군복합형 관광미항 주변지역 발전계획 수립 용역』

[민·군복합형 관광미항 주변지역 발전계획 수립을 위한 지원연구]

(기술부문)

- 과업지시서 -

2011. 8

차 례

Ⅰ. 과업의 개요	1

1. 과업명	1

2. 과업의 배경 및 목적	1

1) 과업의 배경	1

2) 과업의 목적	1

3. 수행기간	1

Ⅱ. 과업의 내용	2

Ⅲ. 연구수행 방법 및 성과품 납품	2

1. 연구수행 방법	2

2. 성과품	2

1) 보고	2

2) 성과품 제출	3

Ⅵ. 예정 공정표	3

Ⅴ. 과업의 일반지침	4

1. 일반사항	4

2. 자료적용	5

3. 기타사항	5

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과업명 : 『민·군복합형 관광미항 주변지역 발전계획 수립을 위한 지원연구』용역

2. 과업의 배경 및 목적

1) 과업의 배경

◦ 대한민국 남방 해역에 대한 영토주권을 주도적으로 확보하기 위한 국가안보사업인 ‘제주 민․군 복합형 관광미항’을 민․관 협력을 바탕으로 성공적으로 추진하기 위한 토대 마련 필요

◦ 이를 위해 국가안보와 제주발전의 합리적 연계, 그리고 지역주민의 권리보호 등이 함께 충족될 수 있고, 중앙정부, 제주도, 지역주민 등 모두가 받아들일 수 있는 실질적인 협력프로그램 작성 필요

2) 과업의 목적

◦ 본 과업은 제주특별자치도에 건설 중인 “민․군복합형 관광미항” 주변지역에 대한 활용계획 및 개발구상을 지원하는 것이 목적

◦ 특히, 발전계획 및 세부사업계획 수립시 국토연구원의 원내 해당연구진이 수행하기 어려운 기술적 측면(구상도 및 조감도 작성, 사업비 산출 등)에서의 지원이 위탁용역기관의 주 역할

3. 수행기간

◦ 계약일로부터 2011년 12월 5일까지

※ 단, 과업 수행기간 중 부득이 한 사유가 발생될 경우 계약당사자가 협의하여 과업기간을 변경 할 수 있음

Ⅱ. 과업의 내용

◦ 대상지역 현황조사 분석 : 현황조사 및 현황도 작성

◦ 개발구상 조감도 및 부분도면 제작

•사업별 구상도 및 부분도면 제작

•전체 구상도 및 조감도 제작

◦ 세부사업별 사업비 산출

Ⅲ. 연구수행 방법 및 성과품 납품

1. 연구수행 방법

◦ 필요한 경우 현장답사를 실시하며, 본원이 요청하는 회의에 참석하여 관련정보를 숙지하고 의견을 제시

◦ 과업내용 중 대안을 제시하는 경우에는 그와 관련한 해외사례를 검토한 후 대안을 제시

2. 성과품

1) 보고

◦ 최종보고 : 과업의 최종연구결과를 작성하여 과업종료 15일전에 보고

※ 최종보고에는 개발구상 도면과 조감도 작성 필수

◦ 수시보고 : 본 과업의 추진상황이나 연구결과에 대하여 발주기관의 요구가 있을 때에는 수시로 보고

※ 보고시기, 보고내용, 보고방법 등에 대해서는 발주처와 협의하여 결정

2) 성과품 제출

◦ 최종조감도 : 최종보고 후 15일 이내에 우리 원의 검토사항을 수렴한 다음 제출

◦ 조사자료, 각종 관련계획의 도면(과업 성과품 규격 및 수량 참조)

◦ 세부사업별 사업비 산출 내역

◦ 과업 성과품 규격 및 수량

제출시기	구 분	수 량	비고
과업준공시	•최종 조감도 및 부분조감도 •도면 및 관련자료 •세부사업별 사업비 산출 보고서	별도 협의	•도면의 원도는 별도 제출 •도면 및 관련자료 부수는 발주처와 합의 •사업비 산출 내역은 산출근거 등 자료 포함

◦ 연구과정에서 생산된 관련 자료(현장 사진, 구상도, 조감도 등 포함)를 CD에 수록하여 제출하고, CD에 수록되는 도면을 칼라로 작성

※ 모든 성과품의 작성은 발주처와 협의하여 결정

Ⅵ. 예정 공정표

구 분	월 별 추 진 일 정				비고
연 구 내 용	8월	9월	10월	11월~12월
1. 현황도 및 공간구상도 작성	5				5
2. 세부사업별 계획(구상)도 및 1차 조감도 등 작성	10	10			20
3. 세부사업별 사업비 산출	5	10	15		30
4. 세부사업별 계획(구상)도 및 2차 조감도 등 작성		10	15	20	45
최종보고				★	-
추 진 도 ( % )	20	30	30	20	100
누적추진도 ( % )	20	50	80	100	-

Ⅴ. 과업의 일반지침

1. 일반사항

◦ 본 과업은 제주특별자치도에서 발주한 “민·군복합형 관광미항 주변지역 발전계획 수립 용역”의 부분과업으로 본 과업의 수행은 전체과업의 추진내용에 따라 추진되어야 한다.

◦ 본 과업수행지침은 “민·군복합형 관광미항 주변지역 발전계획 수립 용역” 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 이에 명시되지 아니한 사항은 발주기관과 협의하여 시행한다.

◦ 과업수행계획서에서 참여하기로 한 당초 과업책임자 및 참여자는 본 과업 완료시까지 원칙적으로 변경할 수 없다. 다만, 변경이 불가피할 경우에는 당초 과업책임자 및 참여자와 동등하거나 그 이상인 자로서 발주처의 사전승인을 득하여야 한다.

◦ 과업수행자는 발주기관의 요청이 있을 경우 세미나, 공청회, 주민설명회, 연구추진지원단회의, 연구자문단회의, 각종 보고회의 등에 참석하여야 한다.

◦ 과업수행 중 부득이한 사유로 당초 공정대로 용역시행이 어려울 때에는 발주기관과 협의하여야 하며, 그 사유가 타당하다고 발주기관이 인정하는 때에는 과업내용과 기간을 조정할 수 있다.

◦ 과업수행자는 계약서에 명시된 이외의 기관에게 과업내용을 하도급 할 수 없다.

◦ 과업수행시 세부과업내용, 추진일정 등에 대하여 발주처와 사전에 긴밀히 협의한 후 수행하여야 한다.

◦ 본 용역 완료 후에라도 성과품의 보완이 필요한 경우 과업수행자는 성과품을 필히 보완 제출하여야 하며, 본 과업수행중 감사로 인한 처분결정 등이 있을 시는 이에 따라야 한다.

◦ 본 과업의 수행시 자료수집 등 행정지원이 필요할 경우에는 발주기관과 협의하여 추진한다.

2. 자료적용

◦ 자료는 그 근거가 명확하고 객관적으로 인정되는 최신의 것을 적용하여야 하며 자료의 출처를 기재한다.

◦ 본 과업에서 사용하는 모든 자료는 가능한 한 전산처리를 원칙으로 하고 필요시 관계자료 및 산출근거 등을 수록하여 제출하여야 한다.

3. 기타사항

◦ 본 과업지시서의 용어해석상에 차이가 있을 경우에는 감독원과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

◦ 기타 사항은 관계규정이 정하는 바에 따라 감독원과 협의 조정하되, 조정이 되지 않을 경우 감독원의 지시를 따르도록 한다.