붙임 2

「2018 평창 동계올림픽 특구 종합계획 기술용역」

- 과업지시서 -

2012. 7

국 토 연 구 원

< 차  례 >

Ⅰ. 과업의 개요	1

Ⅱ. 과업의 주요내용	3

Ⅲ. 보고 및 성과품	6

Ⅳ. 예정공정표	8

Ⅴ. 예산설계서	9

Ⅵ. 일반사항	10

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과업의 배경

◦ 2018년 평창동계올림픽 유치 및 『2018년평창동계올림픽및장애인동계올림픽대회지원등에관한특별법』이 제정ㆍ시행(2012.1.26)됨에 따라 동계올림픽이 일회성 국제행사로 끝나지 아니하고, 대회개최 이후에도 지역의 균형있는 지속가능한 발전을 도모할 수 있도록 ‘동계올림픽특구 종합계획’ 수립 추진 중

- ‘동계올림픽특구 종합계획’은 일반현황 및 잠재력 분석, 국내외 사례 조사ㆍ분석, 동계올림픽 특구의 지정 검토, 특구발전 종합구상, 특구발전 부문별계획, 집행 및 관리 등의 내용으로 구성

2. 과업의 목적

◦ 본 연구는 특구종합계획의 일부(부문별계획)로서 향후 특구의 활성화를 위하여 특구 내 저탄소 및 U-City 도입방안과 특구종합계획의 기술부문을 지원하는 것을 목적으로 함

-『2018년평창동계올림픽및장애인동계올림픽대회지원등에관한특별법』(제41조, 제69조 등)에 명시된 특구종합계획에 대한 기술적 지원

3. 과업의 범위

◦ 과업의 시간적 범위 : 2013~2032년(20년)

- 1단계(2013~2018년) : 대회개최까지

- 2단계(2019~2032년) : 대회개최 이후

◦ 과업의 공간적 범위 : 동계올림픽 개최도시(3개 시ㆍ군) 및 특구 예정지

- 동계올림픽 개최도시 : 강릉시, 평창군, 정선군

- 동계올림픽특구 예정지 : 향후 설정 예정(국토연구원의 연구결과 수용)

4. 과업 기간

◦ 과업의 계약일로부터 4.5개월(130일)

Ⅱ. 과업의 주요내용

1. 동계올림픽특구의 여건분석 및 수요검토

◦ 인문ㆍ사회ㆍ자연환경 등 기초조사

- 동계올림픽 개최도시(3개 시ㆍ군) 및 특구 예정지의 역사․문화․경제․산업․사회․교통․관광․지리적 특성 등을 분석

◦ 관련제도 및 계획 검토

- 동계올림픽 특구와 관련된 국가종합계획, 대상지역에 수립되어 있거나 수립중인 도시계획, 동계올림픽특구 관련 제도 등에 대한 검토

◦ 개발수요 검토

- 동계올림픽 개최로 인한 산업(스포츠산업, 녹색산업 등) 수요, 관광 수요, 주택 수요, 교통 수요, 외국인 투자 수요 등 검토

◦ 현황 및 개발여건 종합분석

- 기초조사, 관련제도 및 계획, 개발수요 검토결과 등을 종합하여 문제점 및 잠재력 등 개발여건을 분석

2. 종합구상(안) 및 특구별 구상(안) 작성

2.1 동계올림픽특구 내 저탄소 실현을 위한 기본방향 및 전략

◦ 쾌적한 정주환경 조성과 저탄소 동계올림픽 실현과 특구의 저탄소화를 유도할 수 있도록 토지이용계획, 기반시설계획, 에너지계획 등과 연계를 통한 계획의 기본방향 및 전략 제시

2.2 동계올림픽특구 내 U-City 도입을 위한 기본방향 및 전략

◦ 다양한 녹색기술 요소와 첨단 Green-IT기술과의 융합으로 도시관리의 효율성을 높이기 위하여 정보통신계획, 기반시설계획, 에너지계획 등과 연계를 통한 계획의 기본방향 및 전략 제시

2.3 종합구상도 및 특구별 구상도 작성

◦ 동계올림픽특구 종합계획의 종합구상도 작성

- 국토연구원에서 제시하는 종합구상(안)을 기반으로 계획도면 작성 및 사업비 산출, 성과작성(조감도 등)을 위한 예시적 Master Plan(2D) 작성

◦ 동계올림픽특구 종합계획의 특구별 구상도) 작성

- 제시된 종합구상(안)을 기반으로 각 특구별 예시적 Master Plan(2D) 작성

3. 부문별 계획도면 작성

◦ 토지이용계획도 작성

- 국토연구원에서 제시한 특구별ㆍ부문별 구상(안)을 토대로 공급처리시설 등의 수요를 검토하여 적정 규모의 기반시설(보건의료시설, 교육ㆍ복지시설, 환경처리시설 등)을 계획하고, 그에 따른 토지이용계획도(1/5,000 ~1/25,000) 작성

- 작성된 토지이용계획도를 바탕으로 시설별, 용도별 토지이용계획표를 산출

※ 토지이용계획 구상시 토목부분의 개략설계를 바탕으로 합리적인 계획을 도출할 수 있도록 작성하며 환경에 미치는 영향의 최소화 및 사업비의 합리적 산정을 도모

◦ 주요 기반시설 배치계획도 작성

- 확정된 토지이용계획(안)을 기초로 도로, 광장, 공원․녹지 등 주요 기반시설 배치계획도(1/5,000 ~1/25,000)를 작성

4. 특구구상(안)에 따른 일부 조감도(3D) 작성

◦ 종합구상(안) 및 특구별 구상(안), 토지이용계획도 등을 바탕으로 국토연구원에서 필요하다고 판단되는 특구내 주요 지구(건축물)에 대한 개략적인 규모, 형태 등의 건축계획을 반영하여 조감도(3D) 예시안 작성

5. 동계올림픽특구 종합구상(안)의 건설부문 사업비 제시

◦ 기반시설 조성 사업비 제시

- 토지이용계획, 기반시설계획을 바탕으로 동계올림픽 특구조성사업을 위한 기반시설 조성 사업비를 산출하여 제시

◦ 단위시설 사업비 제시

- 토지이용계획, 기반시설계획을 바탕으로 공종별 단위공사비 산출하여 제시

◦ 특구조성사업에 소요 되는 총사업비 제시

- 기반시설사업비+단위시설 사업비를 산출하여 제시

6. 관련도면 작성 등 기술적 지원

◦ 동계올림픽특구 종합계획과 관련된 각종 현황도 및 구상도(종합계획구상도, 특구별구상도, 부문별구상도 등) 등 관련 도면 작성 지원

◦ 기타 제반되는 기술적 부문 지원

- 저탄소 동계올림픽 실현을 위한 환경관리시스템과 신ㆍ재생에너지 시설 도입을 위한 기술적 내용 지원 등

Ⅲ. 보고 및 성과품

1. 보 고

◦ 착수보고(용역착수일로부터 1개월 이내) : 주요 과업내용 및 추진계획

◦ 중간보고(용역착수일로부터 3개월 이내) : 중간 성과물

◦ 최종보고(용역완료일 전) : 연구의 최종적인 성과물을 종합ㆍ정리 제시

※ 세부적인 보고일자는 발주처와 사전 협의하여 확정

2. 성과품 제출

◦ 중간보고서 : 중간보고회시(용역착수일로부터 3개월 이내)

- 국배판(A4), 100면 내외, 10부

◦ 최종보고서 : 과업종료시

- 국배판(A4) 150면 내외, 20부

※ 저탄소, U-City, 부문별계획으로 구분하여 작성(합본가능)

- 모든 수록 도면 중 판독이 난이한 도면은 칼라로 작성

- 최종보고서(안)은 과업이 완료되기 7일 전에 보고서 초안을 감독원에 제출하여 검토 받은 후, 본 과업의 준공시 이를 보완하여 최종보고서를 제출

◦ 관련도면(1/5,000 ～ 1/25,000)

- 종합구상도(Master Plan 예시안)

- 특구별·부문별 종합구상도

․토지이용계획도, 기반시설계획도, 교통처리계획도, 관광개발계획도, 기타 특구종합계획에 수록되어야 할 계획도면

- 특구별 Master Plan 도면

- 조감도 (A1 size)

- 기타 특구종합계획 수립에 필요한 일체의 기술부문 성과 1식

◦ 전산파일 : CD 5매

- 최종보고서, 관련 도면 및 통계자료 등을 CD에 수록하여 제출

< 성과품 규격 및 수량 >

구 분		수 량	비 고
보고서	중간보고서	10부	국배판(A4) / 100면 내외
	최종보고서	20부	국배판(A4) / 150면 내외
도 면 (1/5,000-1/25,000)	종합구상도	1식
	특구별ㆍ부문별 종합구상도	1식
	특구별 Master Plan	1식
	조감도	1식	A1 Size
	기타 각종 도면	1식
전산파일	CD	5매	최종보고서, 도면, 통계자료 등 성과품 일체 수록

Ⅳ. 예정 공정표

과 업 내 용	과업기간
	1개월	2개월	3개월	4개월	5개월
1. 동계올림픽특구의 여건분석 및 수요검토
2. 종합구상(안) 및 특구별 구상(안) 작성
3. 부문별 계획도면 작성
4. 특구구상(안)에 따른 일부 조감도(3D) 작성
5. 동계올림픽특구 종합구상(안)의 건설부문 사업비 제시
6. 관련 도면 작성 등 기술적 지원
보 고 회	◎ (착수)		◎ (중간)		◎ (최종)

※ 보고회 일정은 국토연구원과 사전협의하여 확정

※ 국토연구원 본과업 추진일정에 따라 전체 과업기간 및 일정 변동 가능

Ⅴ. 예산설계서

과업내용	규격	수량	단가 (원/일)	금액 (원)
I. 인건비				90,022,534
1. 여건분석 및 수요검토	기술사	6	330,109	1,980,654
	특급기술자	18	258,612	4,655,016
	중급기술자	50	205,855	10,292,750
	초급기술자	60	181,472	10,888,320
2. 종합구상(안) 및 특구별구상(안) 작성	기술사	10	330,109	3,301,090
	특급기술자	18	258,612	4,655,016
	중급기술자	20	205,855	4,117,100
	초급기술자	20	181,472	3,629,440
3. 부문별 계획도면 작성	기술사	6	330,109	1,980,654
	특급기술자	20	258,612	5,172,240
	중급기술자	40	205,855	8,234,200
	초급기술자	80	181,472	14,517,760
4. 특구구상(안)의 일부 조감도(3D) 작성	기술사	-	330,109	-
	특급기술자	-	258,612	-
	중급기술자	6	205,855	1,235,130
	초급기술자	10	181,472	1,814,720
5. 건설부문 사업비 제시	기술사	6	330,109	1,980,654
	특급기술자	10	258,612	2,586,120
	중급기술자	20	205,855	4,117,100
	초급기술자	10	181,472	1,814,720
6. 관련도면 작성 등 기술적 지원	기술사		330,109	-
	특급기술자	-	258,612	-
	중급기술자	6	205,855	1,235,130
	초급기술자	10	181,472	1,814,720
II. 경 비				69,977,466
1. 보고서인쇄비		1식		1,500,000
2. 제경비 (인건비 X 60%)		1식		54,013,520
3. 이윤 ([직접인건비 + 제경비] x 10%)		1식		14,463,945
총 계 (부가세 포함)				160,000,000

Ⅵ. 일반사항

1. 본 과업지시서는 「2018 평창동계올림픽 특구 종합계획 기술용역」와 관련한 업무를 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 이 과업지시서에 의하여 수행하되 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부에서 제정한 각종 시방서 및 지침 등에 따라 발주처와 협의하여 수행한다.

2. 본 과업은 용역계약 후 7일 이내에 착수하여야 하며, 착수 전에 과업수행에 필요한 행정상 제반서류를 제출하여야 한다.

3. 과업에 대한 보고는 착수보고, 중간보고 및 최종보고를 실시하며, 발주처의 요구가 있을 경우 수시보고를 하여야 한다.

4. 본 과업의 과학적이고 능률적인 수행 및 기간단축을 위하여 전산처리에 의한 결과를 얻도록 하여야 하고, 발주처와 호환성 있는 프로그램을 이용하여야 하며 보고서, 도면 등의 자료와 각종 성과품은 전산화하여 최종성과로 제출하여야 한다.

5. 수급인은 관계법령에 의거 해당분야 기술자가 용역수행토록 규정되어 있는 경우 경험이 풍부하고 이에 적합한 기술자가 용역수행토록 한다.

6. 용역완료 후라도 추후 미비사항이 발견될 경우 수급인은 이를 보완하여야 한다.

7. 본 과업지시서에 포함되지 아니한 사항 중 필요하다고 인정되는 사항은 발주처와 수급인이 협의하여 결정한다.

8. 보안사항

가. 수급인은 본 과업을 수행함으로써 산출된 자료 및 내용 등을 발주처의 사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 제공 또는 공개해서는 안된다.

9. 설계변경은 발주처와 수급인에 합의하에 변경이 가능하다.

10. 과업중지

수급인의 귀책사유가 아닌 예상하지 못한 사정의 변경 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우 발주처는 과업중지를 명할 수 있다.

11. 기타사항

가. 본 과업에 관련된 모든 보고서의 조사 분석된 사항과 계산 및 인용 자료는 정리된 자료의 출처와 이에 관련된 근거자료를 제시하여야 하며 과업의 종료 후에는 과업성과품은 물론 과업과 관련된 자료를 제출하여야 한다.

나. 본 과업지시서 해석상 그 의견이 상이할 경우 협의하여 결정한다.

다. 각종 보고시에는 보고용 전문 프로그램 활용을 원칙으로 한다.