국토연구원 신청사 건립공사

건축공사 현장설명서

2015.  06.

1. 공사개요

1-1. 공 사 명 : 국토연구원 신청사 건립공사

- 건축, 토목, 조경, 기계, 기계소방공사 -

1-2. 현장위치 : 세종특별자치시 반곡동 771-125 일원

1-3. 사업개요

1-3-1 건축개요

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	공사명	국토연구원 신청사 건립공사(건축)
	대지위치	세종특별자치시 반곡동 771-125 일원
	지역지구	지구단위계획구역(교육연구시설용지)
	대지면적	16,500.00㎡
	도로현황	전면 27.5M, 우측면 20M 도로에 접함
	연면적	19,955.53㎡
	건축면적	5,840.34㎡
	건폐율	35.39%	법정: 60%이하
	용적율	113.26%	법정: 200%이하
	층수	지하1층, 지상8층
	구조	철근콘크리트조
	최고높이	35.90m
	용 도	교육연구시설
주차대수		148대(지상 88대, 실내 60대) - 장애인주차 7대 포함	법정: 91대 이상 (장애인 주차 6대)
조경면적		4,292.98㎡ (26.01%)	법정: 15%이상

◎ 외부 마감

- 외    벽 : THK30 화강석 버너, 혼드 및 잔다듬(거창석,고흥석),

외단열시스템

- 외부창호 : THK24 투명 및 칼라 로이복층유리

◎ 내부 마감 : 건축도면 참조

◎ 층별 바닥면적

단위(㎡)

구 분	층 별	면 적	비 고
본관	지상 8층	157.78	공조실
	지상 7층	2,036.93	회의실, 연구실
	지상 6층	2,179.15	회의실, 연구실
	지상 5층	2,109.26	회의실, 연구실
	지상 4층	2,053.01	회의실, 연구실
	지상 3층	2,258.22	행정지원본부, 원장실 및 전살실 등
	지상 2층	3,127.25	로비, 도서관, 대강당 및 홍보전시관 등
	지상 1층	4,765.58	홀, 식당, 체력단련실 및 실내주차장 등
	지상층 소계	18,687.18
	지하 1층	1,268.35	기계실, 발전기실, 전기실 및 저수조 등
	지하층 소계	1,268.35
총 계		19,955.53

1-3-3. 공사범위

대 공 종	세 부 공 종
1) 건축공사	기초공사, 골조 및 마감공사, 기타공사 등
2) 기계설비공사	장비설치공사, 옥외배관공사, 기계실배관공사, 공조배관공사, 공조덕트설치공사, 위생배관공사, 가스설비배관공사, 방음방진공사, 우수설치공사, 주방기구설치공사, EHP냉난방공사, 연도설치공사, T.A.B공사, 고무발포보온공사, 승강설비공사, 지열냉난방설비공사, 자동제어 설치공사 등
3) 토목공사	토공사, 우수공사, 오수공사, 상수도공사, 포장공사, 구조물공사, 영구배수공사, 기초공사, 가시설공사, 부대시설공사 등
4) 조경공사	식재공사, 시설물공사, 포장공사, 부대시설공사 등
5) 기계소방공사	소화장비설치공사, 소화펌프실배관공사, 옥내소화전설비공사, 스프링클러설비공사, 제연덕트설비공사, 청정소화가스설비공사등

2. 설계도서 열람장소

o. 경기도안양시 만안구 시민대로 254 국토연구원 3층 소회의실

(국토연구원 청사건축 이전추진단, ☎ 031-380-0219)

o. 수요기관 : 국토연구원 (☏031-380-0219)

3. 공사기간 : 착공일로부터 465일(15.5개월)

4. 특기사항

1) 시공자는 세종특별자치시 경관심의, 교통영향평가, 건축허가 등의 설계단계에서의 인허가 내용, 유의사항 및 권장사항을 충분히 숙지하며 설계도서, 제반 법규를 준수하여 공사에 반영하여야한다.

(심의의견, 건축허가조건 등)

2) 시공자는 공사 착수 전 및 준공 전 자기 부담으로 확인측량 및 경계명시측량을 실시하여 적정한 시공이 이루어지도록 한다.

3) 시공자는 공사에 필요할 경우 도로점용 허가를 득하여야 하며, 그에 대한 비용은 시공자가 부담한다.

4) 시공자는 현장에 시험실을 설치하고 주요 시험기기(압축강도기, 염분

측정기, 슬럼프시험기, 공시체몰드, 다짐시험기, 목재함수율측정기 등)를 갖추고 품질관리자를 배치하여 품질관리를 철저히 하여야 한다.

5) 시공자는 공사 착수 전에 가설시설물 설치계획서, 시공계획서 및 관련  법규에 따라 품질시험계획서, 안전관리계획서를 제출하여 공사감독관의 승인을 받아 시행하여야 하며, 또한 시공자 부담으로 가설사무실에 비치하여야 할 공사현황판,  사무자동화기기(인터넷에 연동되는 컴퓨터, 복사기, 프린트, 스케너, 전화기등 통신시설), 냉⦁난방설비, 사무비품 집기류 등은 감독원의 지시에 따라 설치하고 시공사 및 공사관리관실, 건설사업관리단과 서로 직통 연락이 가능한 통신기기를 설치운용하여야 한다.

6) 시공자는 본 공사 발주 당시의 현장여건을 정밀 파악하여 본 공사로  인하여 인근 시설물에 피해가 없도록 하여야 하고, 또한 소음 진동에 대한 조치를 취해야 하며, 인근 시설물에 피해가 있을 경우에는 시공자 부담으로 즉시 원상복구 조치하여야 한다.

7) 시공자는 공사 착수 전 공사에 지장을 초래할 수 있는 지중 매설물에 대한 조사를 실시하여야 하며 가스관로, 전기ㆍ통신관로, 상ㆍ하수도관로 등은 관할기관의 협조를 받아 공사에 장애가 되지 않도록 사전에 확인 조치한다.

8) 시공자는 지질조사 보고서를 면밀히 검토하여 공사 시행중 토층 구성이 상이하거나 지하수위의 변동, 지내력 부족 등의 사유로 기초공사에 하자가 예상될 경우 피해예방을 위하여 즉시 공사감독관에게 보고하고 공사 관리관의 지시에 따라 변경시공 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

추가 지질조사가 필요한 경우 시추 위치 및 개소 등 제반사항에 대하여

공사 관리관의 승인을 득해 지질조사를 추가 진행 할 수 있다.

9) 시공자는 외부로의 토사 반출시 관련규정에 따라 필요한 경우 축중계를 설치･관리하여야 한다.

10) 시공자는 차량세륜 시설을 토공사 전에 설치하고 공사감독관의 지시에 따라 설치․관리하여야 한다.

11) 시공자는 총사업비 관리지침을 준수하여야하며, 공사착수 전에 설계 도서를 철저히 검토하여 시공에 불합리하거나, 사후 중대한 하자가 예상되거나, 현장상황과 상이한 부분이 있을 경우에는 즉시 공사 감독관에게 서면으로 보고하여 도면이 보완될 수 있도록 조치하여야 하며, 물량의 과다산출 및 누락, 설계서 간 모순, 누락, 오류 등이 있을 시 공사 감독관에게 보고하고 공사 관리관의 승인을 받아 시공하여야 하며, 시공 및 구조상 필요한 부분은 시공 상세도면을 작성하여 공사 관리관의 승인을 받아 시행한다.

12) 시공자는 공사 시행중 품질관리를 위하여 필요시 시공자 부담으로 토질, 구조, 시공 등 전문기관의 자문을 받을 수 있다.

13) 시공자는 공사 착수 전에 가설시설물 설치계획서, 시공계획서, 품질 시험계획서, 안전관리계획서, 예정공정표 등이 포함된 착공계를 제출하여 공사관리관의 승인을 받아야 하며 계약착공일로부터 10일 이내에 가설 사무실(현장사무실, 감독원실 및 상황실 등) 설치를 착수하여 1개월 이내에 사용 할 수 있도록 하여야 한다.

14) 공사 가림막 설치시 세종특별자치시 도시디자인과와 반드시 협의 후 설치하여야 한다

15) 시공자는 공종별 시공계획서를 공종착수 14일전에 제출하여 공사관리관의 승인을 받아 시공하여야 하며, 본 공사에 투입되는 모든 자재는 사전에 견본품을 제출하여 공사감독관의 승인을 받은 후 사용한다.

16) 시공자는 인테리어 시공분에 대하여 “의장공사 면허”가 있는 전

문업체가 시공하도록 해야한다.

17) 시공자는 현장대리인 및 담당기술자를 배치함에 있어 기술과 경험이 풍부하고 본 공사(연구소)와 유사한 건축물의 시공경험이 있는 기술자를 선정․배치하도록 하여야 하며, 사전에 공사감독관의 확인을 받아 공사착공과 동시에 현장에 상주토록 조치하여야 한다.

18) 품질관리원은 건설기술 관리법 등의 관련법에 따라 각각 품질 관련업무를 전담(공사 관리업무 제외)하여야 한다.

19) 시공 상세도면(Shop Drawing)설계담당직원은 건축, 기계, 토목, 조경 등에 총괄설계 CAD 가능한 자 이어야하며 준공 시까지 현장에서 상주하여 설계업무를 전담하여야 한다.

21) 기계설비 분야 현장 선임직원은 중앙집중식 냉난방 설비와 연구시설 공조시스템 등이 적용된 공사현장의 시공경험이 있는 자를 투입하여야 한다.

22) 건축공사 외에도 기계설비, 토목, 조경, 소방분야의 소속직원을 해당 공사기간 동안 현장에 상주시켜야 한다.

23) 시공자는 산업안전보건법 제30조에 따라 산업재해예방을 위한 산업안전 보건관리비를 도급금액에 계상하여야 한다. 또한 산업안전보건법 시행령  제12조, 산업안전보건법시행령 제14조에 의한 안전관리자를 선임하고 산업안전보건법시행령 제13조의 업무를 수행하도록 하여야 한다.

24) 시공자는 건설기술관리법 제26조의2 동법시행령 제46조의4에 의거 안전관리계획서에서 정한 시기와 횟수에 따라 안전 점검을 실시하여야 하며, 정기 및 정밀안전점검 대상에 해당될 경우에는 건설안전 점검전문기관에 의뢰하여 실시하여야 한다.

25) 공사시행 중 건축법, 도로법, 총포화약류단속법, 소방법, 공해방지법,

환경보전법, 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음․진동규제법,

폐기물관리법, 전염병예방법, 오수․분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한

법률 등에 저촉되지 않도록 하여야하며 정부의 에너지정책과 환경

정책에 부응하여야 한다.

26) 시공자는 건설산업기본법 제29조 제5항에 의거 모든 하도급공사에 대하여 하도급계약을 체결한 날로부터 30일 이내에 공사감독관에게 통보하여야 한다.

27) 본 공사 추진에 따른 모든 대 관청업무 및 각종 인․허가사항(사용

승인, 임시사용승인, 및 건축물대장 작성 등 포함)과 기존의 인․허가 변경사항은 발주기관의 협조를 받아 시공자가 시행하여야 하며, 이에 수수료 등은  발주기관(건축주)에서 부담 한다.

기존의 인허가사항은 설계도서와 동일한 효력을 지니며, 인허가사항의 변경 적용 시에는 공사 관리관의 승인을 득해야 한다.

28) 시공자는 건축인·허가 조건, 지구단위계획 지침 등을 이행하여야 하며 관련규정을 따라야 한다. 입찰/낙찰 후 계약   한 공사내용과 건축허가 조건, 각 인증조건이 변경 시 이를 발주기관과 협의 후 설계변경 조치하여야 한다.

29) “신축 공공청사 건물에너지효율 1등급 의무화 제도시행”(국토해양부고시 제2009-1306호, 지식경제부 고시 제2009-329호)에 의거 건축물의 준공 승인(사용협의) 전에 최종설계서 및 현장확인을 거쳐 최종적으로 평가된 결과를 토대로 에너지효율등급 본인증을 득해야 하며, 도급자가 발주기관을 대행하여 시행하고 비용은 발주기관에서 부담한다.

30) “녹색건축물의 인증”(건축법 제65조, 녹색건축물의 인증에 관한  규칙, 녹색건축물 인증기준 고시)에 의거 본인증을 득해야 하며, 도급자가 발주기관을 대행하여 시행하고 비용은 발주기관에서 부담한다.

31) 공사범위의 구분은 공종별 도면 및 내역에 따르고 도면에 표기되지  않은 사항 및 불확실한 부분은 공사 감독관의 해석에 의한 지시에 따르고 현장 여건상 설계변경이 불가피한 부분은 공사관리관의 승인을 받아 변경할 수 있다.

32) 공사현장에서 발생되는 부산물 및 일체의 폐기물은 관계법을 준수하여 재활용이 가능한 품목은 재활용하고 재활용이 어려운 일반(건설)폐기물은 관계법에 따라 처리되도록 조치하여야 한다. 다만, 즉시 장외처리가 어려운 경우에는 공정진행에 방해되지 않는 장소에 모아서 보관하여야 하며 미관에 지장이 없도록 비닐 등으로 덮고 폐기물이 주위로 확산되지 않도록 조치하여야 한다. 아울러, 관련법에 따라 폐기물 성상별 분리배출을 철저히 하고 가수, 토사혼입 등으로 인한 폐기물 물량 오류(증가)를 방지하는 등 건축ㆍ전기ㆍ통신공사 등의 시공자간 공동 관리를 철저히 하여야 한다.

33) 공사 준공 전 공사 관리관이 지정하는 기한까지 전기 수전이 되도록 소방, 전기, 통신 등 타 공종의 진행에 협조하여야 하며, 본전수전 및 시수통수 후의 사용량에 따른 각 기본료는 발주자가 납부하고 시운전 등 공사를 시행하는데 소요되는 사용료는 각 공종별 시공자가 부담한다. 이때, 사용료의 각 공종별 시공자 부담 비율은 업체 간 협의 조정한다.

34) 각종 장비 시운전은 2개월 이상 실시하여 반드시 사용검사를 받은    후 사용하는 데 이상이 없을 시에 발주자에게 시설물을 인계한다.

35) 시공자는 시공시 공사 종사자에 대한 안전교육을 실시하고 공사전반에

대한 안전관리, 소방관리 및 방재관리를 철저히 하여야 하며, 민ㆍ  형사상의 문제점 발생 시 시공자가 책임진다.

36) 시공자는 설계변경 및 지하매설물 등에 대한 공사내용을 정확히 기록,  유지하여 준공 시 준공  설계도서에 명확히 표기하여 제출하여야 하며 기타, 공사 감독관이 요구하는 공사 관련 서류를 명확히 작성하여 제출한다.

37) 기타 내용은 일반시방서(국토해양부제정 표준시방서 포함), 특기시방서 및 설계서 등에 의한다.

38) 문화재 시굴/발굴로 인하여 공사착공이 전체 또는 일부 지연 발생시

발주기관의 지시에 따라 공사를 수행하여야 한다.

39) 본 공사 내역서 작성 시 TAB금액은 추후 정산항목이며, TAB 실시 후 실시내역에 근거하여 감독원에게 보고 후 정산 조치한다.

40) 시공자는 공사 착공 후 실시설계도서의 각 분야(건축, 토목, 전기, 기계 등)별 시공성 검토에 대한 계획을 수립, 공사 관리관의 승인을 받아 시행하여야 한다,

41) 발주자의 예산 등 사정에 의한 사업규모 조정, 공기조정 및 공사의 일부분 제외 또는 변경 요구 시 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다. 또한 본 공사는 총사업비 관리지침에 의해 관리되는 사업으로 안전시공, 법령개정 등의 불가피한 사유가 있는 경우를 제외하고는 공사물량 증가를 초래하는 설계변경은 원칙적으로 인정되지 않는다.(총사업비 관리지침 제54조 참조)

42) 시공자는 건설산업기본법 제34조(하도급 대금의 지급 등)의 규정에

의거 불법 하도급대금 지급행위 근절을 위하여 발주자가 “원도급자가

하도급자에게 지급한 공사대금”과 “하도급자가 수령한 하도급대금”을  비교, 확인하여 하도급대금의 적정지급 여부를 점검하는 『하도급대금지급확인 제도(대통령 지시사항, 2009.1.28일부터 시행)』를 철저히 이행

하여야 하며, 공사관리관의 지시에 따라 하도급대금 지불현황을 제출하여야하며, 위반 시 관련법령에 따라 조치함을 반드시 숙지하여야 한다.

43) 물량내역서는 나라장터(http://www.g2b.go.kr)의 ‘입찰정보→시설→

공고현황 →참조(또는 입찰공고)번호 입력․검색→[입찰집행 및 진행

정보]→물량내역서 내려받기’에서 내려 받을 수 있다. 나라장터

시스템의 ‘시설 기초금액 상세조회’ 화면에서 ‘참고사항’란의 내용 중 물량내역서 변경여부를 반드시 확인하고, 변경된 경우에는 변경된 물량내역서로 투찰해야 한다.

(자료를 열람하지 않아 발생되는 손해 및 책임은 입찰자에게 있다.)

44) 본 공사 입찰에 참가하고자 하는 자(공동도급 구성원 포함)는 반드시 공사입찰 설명서를 열람 숙지하여야 하며, 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있다.

ㅇ 관련 계약예규 및 조달청 집행기준은 나라장터의 ‘나라장터서비스 → 법령정보’ 또는 조달청 홈페이지의 ‘정보장터→법령정보’에서 열람  할 수 있다.

45) 건축물 관리대장 작성 시 각 동별 정리 및 면적기입 등은 발주자 및 공사관리관의 확인을 득해야 한다.

46) 시공자는 관급자재 시공자 설치분에 대한 자재관리, 운반, 시공상세 도면작성 및 시공하자는 시공자의 책임으로 한다.

47) 전 분야 설계도서 내 관급자 관급공사에 관한 내용을 숙지해야 하며 「중소기업제품 구매촉진 및 판로 지원에 관한 법률」 및 「공사용 자재 직접구매 대상품목」으로 지정한 자재중 관급공사 대상 시공조정 시 시공자는 관급자 관급공사의 시방서 및 시공방안에 따라야 한다.

48) 관급공사와 도급공사와의 연결부위 시공 시 시공자는 원활한 공정,  충분한 성능, 연결부위의 미려한 마감 등 에 대한 시공관리는 시공자가 하여야 하며 , 그 하자에 대한 책임은 시공자 부담으로 한다.

49) 관급자재 등의 소유권은 우리원에 있으며, 인도 후 관급자재에 대한 관리상의 책임은 시공자에게 있다. 이를 멸실 또는 훼손하였을 경우에는 시공자 비용으로 재구매하여 설치하여야 한다.

50) 중소기업제품 공사용 자재 직접구매 관련

① 시공자는 공사 착공 후 1개월 이내에 전체 공정표 내에 중소기업 공사용직접구매자재(이하 “공급자재”라 한다)의 소요시기 및 수량을 반영하여 제출하며, 공급자재의 규격서작성, 설계도면, 발주서류 등을 정밀 검토하여 발주처에 의견을 제출하여야 한다.

② 발주처가 시공자 설치 공급자재의 발주를 위해 관련 규격서, 수량 및 상세도를 시공자에게 검토요구 시 5일 이내에 검토의견 및 공급자재 청구서를 제출하여야 한다.

③ 시공자는 자재 계약 후 제조 또는 납품관련 공정회의에 참석하여야 한다.

④ 시공자가 시공자 설치 공급자재의 현장 입고 후부터는 시공자의 책임하에 자재관리를 철저히 하여야 하며 시공자의 부담으로 현장 내 소운반을 하여 관련 시방에 적합토록 설치하여야 한다. 입고 시 공사감독관과 함께 검수 후 시공자가 자재를 인수하여야 하며 인수 후 자재 파손, 손실 등의 발생 시 시공자는 일체의 책임을 지며 제조업체와 협의하여 공사 일정에 차질이 없도록 시공자의 비용으로 재구매하여 설치하여야 한다.

⑤ 발주처의 공급자 설치 공급자재 설치 시 시공자는 적극 협조하여야한다. 또한 공급자재 설치 시 마감방법 및 설치시기는 관련업체와 협의하여 결정하며 시공자는 관련 부대공사를 우선하여 시행하여야 한다.

⑥ 레미콘 등 시공자 설치 공급자재의 물량은 설계서에 명시된 수량 내에서 계약상대자의 공정 단계별 청구수량을 기준으로 하며, 계약상대자의 멸실, 사고 등의 사유로 증가된 물량 및 과잉청구로 인한 잉여물량은 동 공급자재 계약금액에 상당하는 금액을 계약금액에서 감액처리 한다. 또한 각 공급 자재별 할증 물량내의 잉여자재는 도급금액에서 감액처리 한다.

51) 시공자는 각 부위별 시공과 관련된 감독원이 요구하는 계산서에 대하여 (부위별 구조계산서, 각종 성능 계산서 등) 제출해야하며, 비용은 시공자 부담으로 한다.

52) 전 분야 설계도서 내 관급자 관급공사에 관한 내용을 숙지해야 하며, 시공자는 관급자 관급공사의 시공방안에 적극 협조해야 한다. 또한, 관급자 관급공사 진행에 의한 도급공사 부분 연접부위 마감에 대한 시공 및 하자에 대한 책임은 시공자에게 귀속된다.

53) 시공자는 공사가 원활히 진행될 수 있도록 합리적인 공정계획을 수립, 추진하며, 전체 계획공정 대비 90% 미만일 경우에는 공정만회대책을 수립하여 공사감독관의 승인을 얻은 후, 담당임원이 현장에 상주하여 공사를 지휘토록 한다.

54) 시공자는 공사현장과 관련된 정보를 발주자와 공사관리관이 정확하고 신속하게 파악할 수 있도록 공사기간동안 종합건설 관리시스템 (PMIS)에 의해 공사업무를 수행할  수 있도록 하여야 한다. 다만, 시공자가 보유한 종합건설관리시스템이 우수하다고 공사관리관의 판단 시 대체 또는 병행하여 운용할 수 있다.(운용에 관한 사항은 공사감독관의 지시에 따름)

55) 시공자는 착공 후 30일 이내 작업 분류체계에 의한 관리계정을 바탕으로 공정, 공사비 통합관리계획서(EVMS)를 작성하여 공사감독관의 승인을 받아 현장 준공 시까지 지속적으로 관리하여야 한다.

56) 시공자는 안전시공 및 안전관리를 위하여 웹서버 카메라 설치계획을 공사감독관의 승인을 받아 운영하여야 하며(착공후 30일 이내), PMIS와 상호 호환될 수 있도록 설치, 운영 하여야 한다.

57) 시공자는 공사감독관의 지시가 있는 날로부터 3일 이내에 지시사항 이행을 위하여 추가되어야 할 것으로 추정되는 비용 및 기간을 명기한 현장대리인 검토의견서를 공사감독관에게 제출하여 지시사항 시행 여부를 서면으로 확인하여야 한다.

58) 공사감독관은 계약상대자가 계약문서에 부여된 책임을 회피하거나 고의적으로 지연 혹은 불성실하게 이행하고 있다고 판단될 경우 이의 시정을 요구할 수 있으며, 계약상대자가 이에 불응 시 공사 이행분에 대한 대가지급을 중지할 수 있다.

59) 본 사업과 관련하여 발생되는 분쟁의 해결은 협의에 의하여 해결하되, 협의가 이루어지지 아니할 때에는 ｢중재법｣에 의한 중재 또는 법원의 판결에 의하여 해결하고 시공자는 분쟁처리절차 수행기간중 공사의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

60) 시공자는 공사 준공 시 시공자가 부담으로 다음과 같은 성과품을 제출하여야 한다.

구 분	성과품	비 고
ㅇ 준공설계도서	5부	현장대리인, CM 날인
ㅇ 현장시공, 매몰부위, 각종시험 사진	각 1세트	기존시설물 전경포함
ㅇ 각종 인, 허가필증 (사용전 검사필증 포함)	1부
ㅇ CD * 준공설계도서 및 관련 인허가필증 등 일체의 준공관련 자료를 저장	각 3세트
ㅇ 기타 공사감독관이 요구하는 사항	1부

61) “공사 감독관”이라 함은 「건설기술 진흥법 시행령」제5조 제4항 건설사업관리 업무지침서 제4조 12에 의거 공사계약 일반조건 제16조의 업무를 수행하기위하여 발주청이 임명한 기술직원 또는 그의 대리인으로 해당공사 전반에 관한 감독업무를 수행 하고 건설사업 관리를 총괄하는 사람을 말한다.

5. 관급자재 현황

1) 건축공사

도급자 관급

구 분	규 격	단위	수량
레미콘	대전,세종,충남, 25-18-08	M3	387.57
레미콘	대전,세종,충남, 25-21-15	M3	2,746.18
레미콘	대전,세종,충남, 25-24-12	M3	5,225.04
레미콘	대전,세종,충남, 25-24-15	M3	9,103.63
레미콘	대전,세종,충남, 25-27-15	M3	2,496.13
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD400), HD-10, 하치장상차도	톤	310.093
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD400), HD-13, 하치장상차도	톤	479.183
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD400), HD-16, 하치장상차도	톤	121.895
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD400), HD-19, 하치장상차도	톤	155.256
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD500), SH-22, 하치장상차도	톤	1,037.425
시멘트	40kg/포, 하치장도	포	9,717
덱플레이트	ED1A-5, 0.5mm, 상부근1-D10/하부근2-D7/래티스Φ5	M2	1,379.55
덱플레이트	ED1A-6, 0.5mm, 상부근1-D10/하부근2-D7/래티스Φ6	M2	43.89
덱플레이트	ED3-5, 0.5mm, 상부근1-D13/하부근2-D8/래티스Φ5	M2	436.88
덱플레이트	ED3-6, 0.5mm, 상부근1-D13/하부근2-D8/래티스Φ6	M2	102.41
덱플레이트	ED4-5, 0.5mm, 상부근1-D13/하부근2-D10/래티스Φ5	M2	5,549.66
덱플레이트	ED4-6, 0.5mm,상부근1-D13/하부근2-D10/래티스Φ6	M2	1,005.31
덱플레이트	ED5-6, 0.5mm,상부근1-D13/하부근2-D13/래티스Φ6	M2	1,254.62
덱플레이트	ND1A-5, 상부근1-D10/하부근2-D7/래티스Φ5	M2	591.53
덱플레이트	ND1A-6, 상부근1-D10/하부근2-D7/래티스Φ6	M2	479.45
덱플레이트	ND3-5, 상부근1-D13/하부근2-D8/래티스Φ5	M2	660.68
덱플레이트	ND3-6, 상부근1-D13/하부근2-D8/래티스Φ6	M2	759.07
덱플레이트	ND4-5, 상부근1-D13/하부근2-D10/래티스Φ5	M2	1,122.31
덱플레이트	ND4-6, 상부근1-D13/하부근2-D10/래티스Φ6	M2	624.11
덱플레이트	ND5-5, 상부근1-D13/하부근2-D13/래티스Φ5	M2	1,413.02
덱플레이트	ND5-6, 상부근1-D13/하부근2-D13/래티스Φ6	M2	1,553.94
덱플레이트/압출법보온판	비중0.035,100mm	M2	1323.7
덱플레이트/압출법보온판	비중0.035,150mm	M2	1,620.52
덱플레이트/압출법보온판	비중0.035,180mm	M2	4,643.15

구 분	규 격	단위	수량
콘크리트벽돌	190*57*90mm, C종2급	매	517,187
속빈콘크리트블록	100*190*390mm	매	3,335
속빈콘크리트블록	150*190*390mm	매	5,763
속빈콘크리트블록	190*190*390mm	매	60,197
자연석판석	수마, 30mm, 고흥석	M2	9.24
자연석판석	버너, 30mm, 고흥석	M2	3,087.34
자연석판석	잔다듬, 30mm, 고흥석	M2	4,994.66
자연석판석	혼드, 30mm, 거창석	M2	914.5
자연석판석	잔다듬, 30mm, 거창석	M2	2,091.94
도기질타일	300*600*7mm	M2	1,410.89
자기질타일(논슬립)	300*300*7mm	M2	435.61
자기질타일(석재타일)	200*200*15mm	M2	12.78
합성목재데크	20mm*140mm	M2	213.71

관급자 관급

구 분	규 격	단위	수량
AG01(AL.갤러리,PVDF2)	2.450 x 2.200 = 5.390(76.1kg)	EA	1
AG02(AL.갤러리,PVDF2)	2.250 x 2.200 = 4.950(65.9kg)	EA	1
AG03(AL.갤러리,PVDF2)	1.100 x 3.000 = 3.300(44.9kg)	EA	1
AG04(AL.갤러리,PVDF2)	2.000 x 3.040 = 6.080(80.0kg)	EA	1
AG05(AL.갤러리,PVDF2)	2.700 x 3.040 = 8.208(108.7kg)	EA	1
AG06(AL.갤러리,PVDF2)	1.450 x 2.345 = 3.400(50.5kg)	EA	2
AG07(AL.갤러리,PVDF2)	1.650 x 2.345 = 3.869(55.3kg)	EA	2
AG08(AL.갤러리,PVDF2)	2.400 x 2.000 = 4.800(63.9kg)	EA	1
AG09(AL.갤러리,PVDF2)	2.700 x 3.000 = 8.100(71.5kg)	EA	1
AD01(AL,단열창,PVDF2,시스템도어)	1.000 x 2.300 = 2.300(132.1kg)	EA	3
AD02(AL,단열창,PVDF2,시스템도어)	2.150 x 3.000 = 6.450(179.7kg)	EA	1
AD03(AL,단열창,PVDF2,시스템도어)	2.350 x 3.000 = 7.050(183.2kg)	EA	1
AD04(AL,단열창,PVDF2,시스템도어)	2.150 x 3.000 = 6.450(179.7kg)	EA	1
AD05(AL,단열창,PVDF2,시스템도어)	2.150 x 3.000 = 6.450(179.7kg)	EA	1
AD06(AL,단열창,PVDF2,시스템도어)	1.650 x 3.000 = 4.950(156.07kg)	EA	1
AW01(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	2.400 x 3.800 = 9.120(145.8kg)	EA	66
AW02(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	2.400 x 4.000 = 9.600(149.7kg)	EA	24
AW03(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	2.400 x 3.800 = 9.120(145.8kg)	EA	73
AW04(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	2.400 x 4.000 = 9.600(149.7kg)	EA	27
AW05(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	1.500 x 2.400 = 3.600(69.5kg)	EA	4
AW06A(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	1.100 x 2.400 = 2.640(51.0kg)	EA	19
AW06B(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	1.100 x 2.400 = 2.640(51.0kg)	EA	8
AW07(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	1.100 x 3.000 = 3.300(55.6kg)	EA	5
AW08(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	1.100 x 3.000 = 3.300(55.6kg)	EA	8
AW09(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	1.450 x 1.520 = 2.204(65.5kg)	EA	2
AW10(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	0.725 x 1.140 = 0.826(14.3kg)	EA	2
AW11(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	1.100 x 1.140 = 1.254(17.1kg)	EA	2
AW12(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	9.900 x 1.200 = 11.880(422.6kg)	EA	1
AW13(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	9.900 x 1.200 = 11.880(422.6kg)	EA	2
AW14(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	5.550 x 1.800 = 9.990(375.8kg)	EA	1
AW15(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	2.550 x 1.800 = 4.590(140.0kg)	EA	1
AW16(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	1.650 x 1.520 = 2.508(114.5kg)	EA	14

구 분	규 격	단위	수량
AW17(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	1.650 x 1.520 = 2.508(114.5kg)	EA	5
AW18(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	4.950 x 1.520 = 7.524(321.3kg)	EA	3
AW19(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	4.950 x 1.520 = 7.524(321.3kg)	EA	1
AW20(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	7.890 x 1.520 = 11.992(495.2kg)	EA	1
AW21(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	7.890 x 1.520 = 11.992(495.2kg)	EA	1
AW22(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	7.890 x 1.520 = 11.992(495.2kg)	EA	1
AW23(AL,단열창,PVDF2,시스템도어,롤방충망)	8.330 x 3.000 = 24.990(456.7kg)	EA	1
AW25(AL,단열창,PVDF2)	8.980 x 5.700 = 51.186(402.3kg)	EA	1
AW26(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	1.450 x 5.900 = 8.555(345.4kg)	EA	1
AW27(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	1.450 x 5.900 = 8.555(345.4kg)	EA	1
CW01(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	A=387.441(4442.1kg)	EA	1
CW02(AL,단열창,PVDF2,시스템도어,롤방충망)	24.680 x 7.800 = 192.504(4500.6kg)	EA	1
CW03(AL,단열창,PVDF2,시스템도어,롤방충망)	45.430 x 3.600 = 163.548(2999.1kg)	EA	1
CW04(AL,단열창,PVDF2,시스템도어,롤방충망)	A=399.764(3566.0kg)	EA	1
CW05(AL,단열창,PVDF2,시스템도어,롤방충망)	9.180 x 3.200 = 29.376(642.5kg)	EA	1
CW06(AL,단열창,PVDF2,시스템도어,롤방충망)	A=68.646(1291.0kg)	EA	1
CW07(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	14.455 x 13.600 = 196.588(2279.6kg)	EA	1
CW08(AL,단열창,PVDF2,시스템도어,롤방충망)	A=746.765(10453.0kg)	EA	1
CW09(AL,단열창,PVDF2,시스템도어,롤방충망)	A=746.765(10005.7kg)	EA	1
CW10(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	17.514 x 5.300 = 92.824(1211.2kg)	EA	1
CW11(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	17.514 x 5.300 = 92.824(1211.2kg)	EA	1
CW12(AL,단열창,PVDF2)	4.680 x 9.600 = 44.928(492.8kg)	EA	1
CW13(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	9.820 x 14.800 = 145.336(2135.4kg)	EA	1
CW14(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	7.900 x 14.800 = 116.920(1767.8kg)	EA	1
CW15(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	10.100 x 14.800 = 149.480(2160.7kg)	EA	1
CW16(AL,단열창,PVDF2,롤방충망)	7.900 x 14.800 = 116.920(1767.8kg)	EA	1
SCW01(STEEL.단열창)	19.860 x 8.100 = 160.866(4928.0kg)	EA	1
SCW02(STEEL.단열창)	38.730 x 8.400 = 325.332(8292.0kg)	EA	1
SCW03(STEEL.단열창)	9.930 x 17.800 = 176.754(5431.0kg)	EA	1
SCW04(STEEL.단열창)	9.930 x 17.800 = 176.754(5401.0kg)	EA	1

2) 기계공사

구 분	규 격	단위	수량	비고
팬코일유니트	각종	식	1	도급자 관급
냉각탑	700 CRT	대	2	관급자 관급
냉동기	280 RT	대	2
저수조	362 ton	대	1
공기조화기	각종	대	8
급수가압펌프	각종	SET	1
EHP	각종	식	1
환기유니트	각종	대	21
항온항습기	각종	식	1
자동제어설치공사	각종	식	1
고무발포보온재	각종	식	1
지열시스템	각종	식	1	신재생 에너지

3) 토목공사

구 분	규 격	단위	수 량	비 고
레 미 콘	25-18-8	M3	101	도급자 관급
	25-21-12	M3	121
자연경계석	보차도용(직선), 180×200×1,000 R30	개	218
	보차도용(곡선), 180×200×1,000 R30	개	45
	보차도용(경사), 180×200×1,000 R30	개	6
	보차도용(직선), 180×200×1,000	개	355
	도로용, 직선, 150×150×1,000	개	4
이형철근	D13M/M(SD300)	TON	1.997
	D16M/M(SD300)	TON	0.945
	D19M/M(SD300)	TON	0.192
시멘트	40kg/포, 하치장도	포	8,778

4) 조경공사

구 분	규 격	단위	수량	비고
레미콘	25-18-8	M3	79	관급자재(도급)
시멘트	40kg/포, 하치장도	포	883
인조화강석블록	THK60(투수)	M2	4,569
	THK80(불투수)	M2	326
화강석 판석	포천석 30㎜ 버너	M2	49
	마천석 30㎜ 버너	M2	139
	고흥석 30㎜ 버너	M2	700
화강석 경계석	150×150×1,000 직선	m	1,457
	100×100×1,000 직선	m	549
합성목재테크	140×20×3,600	M2	2,357
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD300), D13	톤	3

※ 도급자는 별도공사(추후공사)분에 대한 사항에 대해서 도면 및 내역서를 반드시 확인해야하며, 추후 발주청과 별도 협의하여 진행한다.

【붙임1】

질 의 회 신

1. 본 입찰 공고문에 기재된 일정을 준수 바라며 기간 이외에는 추가적인 질의는 불가하므로 입찰관련도서를 충분히 숙지하여 입찰에 참가하여야 합니다.

2. 질의사항은 반드시 제공된 해당 소정양식(첨부 “서식1”사용)으로  E-Mail로만 가능합니다.

3. 질의는 2015년 6월 22일까지 E-Mail을 통하여 접수하고, 2015년 6월 26일까지 개별 또는 우리 원 홈페이지(www.krihs.re.kr) [알림마당-입찰공고] 를 통해 회신 예정입니다.(변경시 홈페이지 공지)

4. 질의회신은 본 입찰 지침의 추가 또는 수정사항으로 간주합니다.

5. 참여자가 확인하지 않은 사항에 대하여는 우리 원에서는 책임을 지지 아니 합니다.

ㅇ 질의회신 담당자

- 이메일 :

- 전  화 :

【서식1】

서면질의서
대표업체		대 표 자	(인)
담 당 자		전화번호
소 재 지		E-Mail
질의제목		질의일시	2015. 6 . .
질의사항 (page)	질 의 내 용
	※ 제공도서를 다시 한번 숙지하시고 질의하여 주시기 바랍니다. ※ 작성된 한글파일(원본) 및 대표자(인) 날인된 PDF 파일을 이메일로 제출하시기 바랍니다.