[붙임 1]

수계운영 모델링을 통한

최적의 댐 연계운영 방안

- 시행계획서 -

2015. 12

1. 본 과제 개요

-  -

◦ 과 제 명 : 북한 수력발전자원 개발방안 연구

◦ 과업기간 : 2015.10. 7. ~ 2016.10.12.

◦ 주요 연구내용

- 국내외 수력발전 관련법령․개발체계 현황 및 문제점 분석을 통한 선진적 댐 운영관리방안 제시

- 댐 모의운영을 통한 합리적 수자원 개발체계 등의 정책대안 제시

- 북한 수력산업의 현황을 분석하고 개발시나리오를 설정하여 통일한국, 경제협력활성화 후 북한 수력발전자원 개발을 위한 법․제도 개선방안 제시

2. 위탁용역 개요

๐ 용 역 명 : 수계운영 모델링을 통한 최적의 댐 연계운영 방안

๐ 용역목적

- 북한강과 섬진강 수계를 대상으로 수계 내 수력발전댐의 단독운영방안 및 다목적댐과의 연계운영방안을 모델링하여 최적의 댐 운영방안을 도출

- 모델링 결과를 토대로 향후 수력발전댐의 단독 및 연계운영에의 시사점을 도출함이 목적

๐ 용 역 비 : 일금 오천만원 (￦50,000,000) 미만

๐ 용역기간 : 계약일로부터 6개월간

๐ 시행방법 : 공개경쟁입찰

- 국토연구원 「위탁연구사업규칙」에 의거 협상에 의한 계약

๐ 수행방법

- 과업지시서에 의거하여 수행하여야 하며, 과업지시서에 명시되지 않는 사항이라도 과업목적을 위해 필요한 사항은 발주기관과 협의하여 시행하여야 함

- 본 과업은 국토연구원과 협동과제이므로 연구진행 시 발주기관과 협동으로 설계하고 분석하여야 함

3. 위탁용역의 주요 내용

□ 한강 및 섬진강 수계의 수문자료 및 댐 운영자료 수집‧분석

๐ 한강 및 섬진강 수계의 강우-유출자료를 수집하여 특성을 분석

- 한강 수계의 월별‧연도별 강우자료를 수집‧분석하여 강우특성을 분석

- 한강 수계의 월별‧연도별 유출량 자료를 수집‧분석하여 유출특성을 분석

- 섬진강 수계의 월별‧연도별 강우자료를 수집‧분석하여 강우특성을 분석

- 섬진강 수계의 월별‧연도별 유출량 자료를 수집‧분석하여 유출특성을 분석

- 분석결과를 종합하여 한강 및 섬진강 수계의 강우특성과 유출특성을 분석

๐ 댐 운영 현황자료 수집‧분석

- 한강 수계의 다목적댐 및 수력발전댐 운영규정 조사‧정리

- 한강 수계의 다목적댐 및 수력발전댐 운영현황(유입량, 유출량, 방류량, 수력발전량, 홍수조절량, 용수공급량 등) 조사‧정리

- 섬진강 수계의 다목적댐 및 수력발전댐 운영규정 조사‧정리

- 섬진강 수계의 다목적댐 및 수력발전댐 운영현황(유입량, 유출량, 방류량, 수력발전량, 홍수조절량, 용수공급량 등) 조사‧정리

□ 수계운영 모델링을 위한 기법 선정

๐ 수계운영 모델링관련 선행연구 조사‧정리

- 수계운영 모델링과 관련된 국내외 문헌을 조사하여 한강 및 섬진강 수계에의 적용을 위한 시사점을 도출

๐ 수계운영 모델링을 위한 기법 선정

- 기존의 모의운영기법, 최적화 기법 등의 장‧단점을 비교하여 한강 및 섬진강 수계에 적합한 모델링 기법을 선정

□ 한강 및 섬진강 수계의 최적 댐 연계모의

๐ 연계모의운영을 위한 기본가정 및 모의 시나리오 작성

- 한강 및 섬진강 수계의 최적 댐 연계모의를 위해 필요한 기본가정과 다양한 모의 시나리오를 작성

๐ 연계모의운영 및 결과분석

- 목적함수를 용수공급, 수력발전, 홍수조절 등으로 설정하여 수력발전댐의 단독운영 및 다목적댐과의 연계운영시 각각 최적의 모의결과와 시사점을 도출

- 모의결과를 토대로 향후 한강 및 섬진강 수계의 최적 수력발전댐 운영방안 제시

- 모의결과는 관련된 주요 선행연구의 결과와 비교

๐ 여건변화에 대응한 수력발전사업자(한수원)의 수력발전댐 운영전략 제시

- 모의결과를 토대로 기후변화, 통일, 경제협력 활성화 등 다양한 여건변화에 대응하기 위한 수력발전사업자의 수력발전댐 운영전략을 제시

- 일본, 미국, 독일 등 주요 선진국의 댐 건설 및 운영관리 최적 사례를 조사하여 우리나라 댐 건설 및 운영관리에의 시사점을 도출

□ 결론 및 건의

๐ 연구결론

- 조사‧분석 및 모의결과들을 종합하여 연구결론을 제시

๐ 건의

- 수력발전사업자의 댐 건설 및 운영개선을 위한 건의사항을 제시

□ 연구성과물

๐ 결 과 물 : 보고서 3부(A4), 원본파일을 수록한 CD 1부 제출

๐ 제출양식 : 원고형태

4. 향후 추진일정(안)

◦ 2015.12.17(목) 연구원 홈페이지 공고(12일간)

◦ 2015.12.28(월) 제안서 접수마감

◦ 2015.12.29(화) 제안서 평가

◦ 2015.12.30(수) 위탁자 선정

◦ 2016.01.01.(금) 계약체결 및 과업 개시

※ 상기 일정은 연구원 사정에 의해 변경될 수 있음