첨부 2

첨부2 기술부문 과업지시서_전북.hwp

「전라북도 도로안전개선계획 수립 연구」 중 기술부문

-  과업지시서  -

2017. 7

국 토 연 구 원

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과업명

◦ 「전라북도 도로안전개선계획 수립 연구」 중 기술부문

2. 배경 및 목적

◦ 사회여건의 변화 등으로 인하여 도로정책의 패러다임이 경제성 중심에서 형평성 및 안전성 중심으로 변화하고 있음

◦ 기존의 도로안전 개선사업인 위험도로 개량사업, 교통사고 잦은 곳 개선사업 등은 도로의 단편적인 요소만을 반영하였으나

◦ 최근 개발된 도로안전성 분석기법은 도로의 기하구조, 교통사고, 교통환경 등 다양한 요인을 반영 할 수 있도록 개발됨

ㅇ 이에, 도로안전성 분석기법(국토연구원, 2013)을 적용하여, 전라북도의 위험도로를 개선하고자 함

ㅇ 또한, 위험도로로 선정된 구간에 대해 기본설계 등 구체적 개선 방안을 제시

4. 과업의 내용

◦ 시간적 범위 : 기준연도는 2016년

◦ 공간적 범위 : 국도, 국가지원지방도, 지방도 중 2차로

* 시설안전성 확보 및 효율적인 도로투자방안 검토에 필요한 도로가 있을시에는 공간적 범위에 포함하여 검토해야 함

◦ 내용적 범위 : 1. 기초자료 조사

2. 현장조사 및 도로 기하구조 분석

3. 사고 위험도 산출

4. 도로안전 개선방안 마련 및 사업비 산출(기본설계 포함)

5. 과업기간 및 용역비

◦ 과업기간 : 착수일~2018년 6월 11일(월)

◦ 용역비 : 총 90,450,000원(부가세 포함)

Ⅱ. 과업의 세부내용

1. 기초자료 조사

◦ 전라북도 교통사고 현황 및 추이변화 분석

◦ 토지이용 및 주요시설 등 관련계획 조사

◦ 도로 현황 조사

2. 현장조사 및 도로 기하구조 분석

◦ 도상조사를 통한 기하구조 불량구간 개략조사

◦ 교통사고 다발구간 및 발생예상구간 현장조사

◦ 분석 대상구간 선정

3. 사고 위험도 산출

◦ 대상구간 도로대장 등을 이용한 기하구조 분석 및 위험도 산출

◦ 도로안전성 분석기법을 활용한 사고영향계수 및 위험도 산출

4. 도로안전 개선방안 마련 및 사업비 산출

◦ 사업대상구간 기하구조 개선방안 마련(기본설계 포함)

◦ 사업비 산출 및 연차별 투입계획 마련

Ⅲ. 과업수행지침

1. 일반지침

◦ 본 과업기간은 착수일로부터 2018년 6월 11일까지로 함

◦ 본 과업의 수행과정에서 과업지시서에 명기되지 않았거나, 불명확한 사항이 있을 경우에는 우리 연구원과 협의 후 시행하여야 함

◦ 본 과업수행에 참여하는 연구진은 관계분야에 대한 전문적 지식과 경험이 풍부한 자로 구성하여 합리적이고 효율적으로 과업이 수행될 수 있도록 하여야 함

◦ 과업수행계획서에서 참여하기로 한 당초 과업책임자 및 참여자는 본 과업 완료시까지 원칙적으로 변경할 수 없으나, 변경이 불가피할 경우에는 당초 과업책임자 및 참여자와 동등하거나 그 이상인 자로서 발주처의 사전승인을 득하여야 함

◦ 과업수행자는 발주기관의 요청이 있을 경우 연구협의회, 각종 회의 등에 참석하여야 함

◦ 과업수행 시 세부과업내용, 추진일정 및 추진방법 등에 대하여 발주처와 사전에 긴밀히 협의한 후 수행하여야 함

◦ 본 용역 완료 후에라도 성과품의 보완 및 관련 자료 작성지원 등이 필요한 경우 과업수행자는 이를 수행하여야 하며, 본 과업수행 중 감사로 인한 처분결정 등이 있을 시는 이에 따라야 함

2. 자료적용

◦ 본 과업수행에 적용하는 자료는 그 근거를 명확히 제시하고 객관적으로 인정되는 최신의 것을 적용해야 함

◦ 계획의 지표는 정부 또는 해당 시도의 공식지표가 있는 것은 이를 적용하고, 기타 정부기관의 잠정지표, 당해 부문 전문기관의 자료 순으로 적용하며, 자료가 없는 경우에는 별도로 추정함

◦ 통계자료는 통계청 통계자료, 중앙부처 및 관계행정기관 통계자료, 한국은행 통계자료 등과 같이 공공기관의 공신력 있는 자료를 활용함

3. 보안사항

◦ 과업 중 생산된 모든 자료 및 성과품은 사전 승인 없이 타 목적을 위하여 사용할 수 없음

◦ 물의를 일으킬 수 있는 과업내용은 외부에 유출되지 않아야 함

◦ 과업수행자는 과업수행에 따른 보안대책을 수립하여 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 함

◦ 비밀 또는 대외비로 분류된 성과물을 발간하고자 할 때에는 정부 비밀 취급인가 업체를 이용하여야 함

◦ 용역수행과정에서 발생한 각종 자료와 용역 성과품은 준공 시 전부 납품하고, 성과품을 추가로 인쇄하여 별도 보관할 수 없음

Ⅳ. 보고 및 성과품

1. 보고

◦ 과업수행자는 발주처의 요청이 있을 경우 과업의 진행 중에 있더라도 그 내용을 보고하여야 하며, 과업수행의 효율을 기할 수 있도록 주요 현안사항에 대하여는 협의를 거쳐 시행하고, 그 기록을 유지하여야 함

◦ 최종보고

- 과업종료 전에 과업의 최종 연구결과를 보고서로 작성하여 보고하여야 함

◦ 수시보고

- 본 과업의 추진상황이나 연구결과에 대하여 발주처의 요구가 있을 때에는 수시로 보고하여야 함

2. 성과품 제출

◦ 과업지시서에 의한 모든 성과품의 규격, 편집, 인쇄방법 등에 대하여는 사전에 발주처와 협의하여 최종성과품 제출에 협조하도록 하여야 함

◦ 용어는 한글사용을 원칙으로 하되, 전문용어 뜻이 혼돈되거나 불명확한 경우에는 영어, 한자 등을 병기할 수 있음

◦ 과업 성과품 및 제출시기, 수량

구 분	제출시기	수 량
착수 보고자료	계약일로부터 1개월 이내	3 부
중간 보고서	계약일로부터 6개월 이내	3 부
최종 보고서(안)	과업종료 1개월 전	3 부
최종 보고서	과업종료 시	5 부
부록 (기하구조 현황조서)	과업종료 시	50 부
수치지도	과업종료 시	50 부
최종성과품 CD	과업종료 시	1 식

※ “발주기관”의 방침 등에 따라 성과품 종류 및 제작방법, 소요 부수는 변경될 수 있음

Ⅴ. 예산내역서(안)

(단위 : 원)

구분		금액	구성비	비고
비목
직접인건비	기술사	7,028,340
	특급기술자	9,461,655
	중급기술자	5,840,610
	고급기능사	5,651,760
	중급기능사	4,690,920
	소계	32,673,285	36.1%
제경비(인건비의 110%)		35,940,614	39.7%
기술료(인건비+제경비의 20%)		13,613,374	15.1%
공급 가액		82,227,273
부가가치세(10%)		8,222,727	9.1%
합계		90,450,000	100.0%

※ 최종 계약체결시의 예산내역서와 상이할 수 있음