<붙임 1> 위탁용역 시행계획서

『신산업발전을 위한 대구융합기술산업단지 조성 사업 타당성 조사 연구용역』중 입지선정 및 개발구상 기술부문

위탁용역 시행계획서 -

2017. 08

1. 과제 개요

1) 과제명　: 신산업발전을 위한 대구융합기술산업단지 조성 사업 타당성 조사 연구용역

2) 과업기간 : 2017.5.16.~2018.3.15

3) 주요연구내용

◦ 대구 융합기술산업단지 개발여건 분석

◦ 대구 융합기술산업단지 조성 필요성과 타당성

◦ 국내외 사례조사 및 시사점

◦ 대구 융합기술산업단지 개발수요 분석

◦ 대구 융합기술산업단지 개발규모 및 입지 선정

◦ 대구 융합기술산업단지 개발구상

◦ 대구 융합기술산업단지 사업성 및 파급효과 분석

◦ 대구 신산업단지 개발 추진방안

4) 위탁용역사유

◦ 4차 산업혁명을 선도하기 위한 대구 융합기술산업단지의 체계적이고 효율적 조성을 위한 비전과 기본방향을 정립하고 이를 위한 사업추진 기본구상 및 기본계획을 수립함에 있어 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 대구 융합기술산업단지 후보지의 입지선정 및 개발구상(안) 등에 관한 기술부문 지원업무의 수행에 그 목적이 있음

2. 위탁용역 개요

1) 용역명　: 『신산업발전을 위한 대구융합기술산업단지 조성 사업 타당성 조사 연구용역』중 입지선정 및 개발구상 기술부문

2) 용역기간 : 용역계약체결일로부터 6개월

3) 설계금액 : 일금 일억원원정 (￦100,000,000/부가세 포함)

4) 과업 세부내용

가. 대구 융합기술산업단지 개발수요 분석

ㅇ 대구시 산업입지 수요전망

ㅇ 기업체 수요 조사

ㅇ 수요 분석 결과의 종합

나. 대구 융합기술산업단지 개발규모 및 입지 선정

ㅇ 입지후보지 선정 기준 마련

ㅇ 입지후보지별 현황분석

ㅇ 입지후보지 선정 대안 평가 및 입지선정

다. 대구 융합기술산업단지 개발구상

ㅇ 기본구상

ㅇ 토지이용대안 작성

ㅇ 최적안 선정

라. 사업성 분석

ㅇ 단지 조성비 추정

ㅇ 사업성 검토

ㅇ 단계별 추진전략 구상

3. 선정 방법

◦ 입찰공고 및 제안서 접수방법 : 우리원 홈페이지 공고 후 제안서 접수

◦ 심사위원 구성은 우리원 내규에 따름

◦ 우리원의 ｢위탁연구사업시행규칙｣에 의거 ‘협상에 의한 계약’에 따라 경쟁입찰·평가 시행

* 협상에 의한 계약 : 위탁연구사업의 목적 및 애용에 따라 복수의 업체(기관)로부터 연구제안서를 제출받아 평가한 수 협상절차를 통하여 연구원에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결 할 수 있다.

4. 향후 추진일정(안)

◦ 2017년 8월 22일(화) ~ 9월 1일(금) : 본원 홈페이지 공고

◦ 2017년 9월 1일(금) : 제안서 접수 마감

◦ 2017년 9월 4일(월) : 제안서 평가 예정

◦ 사업자 선정 후 계약 체결 및 과업착수

※ 상기일정은 연구원 사정에 의하여 변경 가능