붙임 1

『대전 도심융합특구 기본계획 수립 용역』

대전 도심융합특구

현황·산업분석과 공간·사업구상 지원

- 과업지시서 -

2021. 12

Contents

1. 과업명 / 1

2. 과업 배경 / 1

3. 과업 목적 / 1

4. 과업 기간 / 2

5. 주요 과업 및 세부 추진 내용 / 2

6. 과업의 일반지침 / 3

7. 성과품 / 5

8. 예정공정표 / 6

과업명

ㅇ 대전 도심융합특구 현황·산업분석과 공간·사업구상 지원

과업 배경

ㅇ 대전시가 제안한 도심융합특구 후보지가 국가균형발전위원회에 보고 후 사업시구로 최종 선정됨(‘21.3.10)

ㅇ 대전시는 대전혁신도시 및 대전형 뉴딜의 성공의 목적에서 원도심 일원에 대덕특구 재창조 사업과 연계한 산·학연관 클러스터를 구축하여 고밀도 혁신공간 지원 거점을 조성하는 도심융합특구 기본계획을 착수

ㅇ 이에 대전 도심융합특구 대상지 현황·여건분석, 기본구상에 대한 세부 공간구상(안) 마련, 특화전략 및 핵심사업 등 개략적 건축계획과 사업성 검토 등으로 추진전략의 구체화 필요

과업 목적

ㅇ (대전 도심융합특구 대상지 현황·여건분석) 대전 도심융합특구의 구체적인 공간 현황·실태를 파악하고, 공간·산업·인프라 등 각종 분야 수요 분석 추진

ㅇ (기본구상에 대한 세부 공간구상) 거점별 추진전략, 특화전략 및 핵심사업 구상 등을 통한 대전 도심융합특구 기본구상 구체화

ㅇ (핵심사업의 구체적 계획 수립 및 사업성 분석) 핵심사업의 입지·규모, 개략사업비 및 사업성, 대전시 도심융합특구에 기수립된 계획과의 연계 방안 등 검토를 통한 사업 추진 여건 구체화

과업 기간

ㅇ 계약일 ~ 2022년 09월 26일

주요 과업 내용

ㅇ 대전시 도심융합특구 관련 여건 분석

- 대전시 인구·사회 여건 분석 (인구, 문화, 일자리 등)

- 대전시 공간·인프라 여건 분석 (주거, 교통, 인프라 등)

- 대전시 산업 및 지역경제 여건 분석 (제조, 서비스, 창업 등)

- 대전시 혁신 역량 및 네트워크 여건 분석 (기업, 연구소, 인력 등 조사·분석)

- 도심융합특구 활용 컨셉 및 도입기능 설정 (경쟁우위, 지역특화, 유치기능·업종 등)

ㅇ 대상지 현황 및 여건 공간 분석

- 대상지(사업지구) 공간적 현황 및 여건 검토

- 국가·광역·도시적 차원의 입지 여건 분석

- 도시공간 및 산업구조적 위계 및 기능 분석

- 상위 및 관련계획, 혁신·융복합 관련 유관사업 검토

- SWOT(종합) 분석 및 특화·활용방향 정립

ㅇ 기본구상 및 세부 계획, 거점별 추진 전략 지원

- 공간·산업·인프라 수요 및 공급규모 설정 분석 지원

- 공간구조 및 토지이용 계획

- 거점별(선화 구역, 대전역세권 구역, 인근지역) 추진전략 수립 지원

ㅇ 특화전략 및 핵심사업 구상 지원

- 거점 및 주요 기능별 핵심사업 구상 지원

- 핵심사업을 활용한 단계별 사업 확대·연계체계 마련 지원

ㅇ 사업비 및 소요예산 분석

- 대전시 총사업비 추정 및 비용부담(안) 마련

- 연차별 투자계획 등 단계적 투자방안 정립

- 공공·수익성, 지역경제 파급효과(산업, 일자리 등) 분석 지원

과업의 일반지침

일반사항

ㅇ 본 과업은 「대전 도심융합특구 기본계획 수립 용역」의 일부로, 본 과업의 수행은 전체 과업의 추진내용에 따라 추진되어야 한다.

ㅇ 본 과업수행지침은 「대전 도심융합특구 기본계획 수립 용역」을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 이에 명시되지 아니한 사항은 발주기관과 협의하여 시행한다.

ㅇ 과업수행계획서에서 참여하기로 한 당초 과업책임자 및 참여자는 본 과업 완료시까지 원칙적으로 변경할 수 없다. 다만, 변경이 불가피할 경우에는 당초 과업책임자 및 참여자와 동등하거나 그 이상인 자로서 발주처의 사전승인을 득하여야 한다.

ㅇ 과업수행자는 발주기관의 요청이 있을 경우 세미나, 공청회, 주민설명회, 연구추진지원단회의, 연구자문단회의, 각종 보고회의 등에 참석하여야 한다.

ㅇ 과업수행 중 부득이한 사유로 당초 공정대로 용역시행이 어려울 때에는 발주기관과 협의하여야 하며, 그 사유가 타당하다고 발주기관이 인정하는 때에는 과업내용과 기간을 조정할 수 있다.

ㅇ 과업수행자는 계약서에 명시된 이외의 기관에게 과업내용을 하도급 할 수 없다.

ㅇ 과업수행시 세부과업내용, 추진일정 등에 대하여 발주처와 사전에 긴밀히 협의한 후 수행하여야 한다.

ㅇ 본 용역 완료 후에라도 성과품의 보완이 필요한 경우 과업수행자는 성과품을 필히 보완 제출하여야 하며, 본 과업수행중 감사로 인한 처분결정 등이 있을 시는 이에 따라야 한다.

ㅇ 본 과업의 수행시 자료수집 등 행정지원이 필요할 경우에는 발주기관과 협의하여 추진한다.

자료적용

ㅇ 자료는 그 근거가 명확하고 객관적으로 인정되는 최신의 것을 적용하여야 하며 자료의 출처를 기재한다.

ㅇ 본 과업에서 사용하는 모든 자료는 가능한 한 전산처리를 원칙으로 하고 필요시 관계자료 및 산출근거 등을 수록하여 제출하여야 한다.

기타사항

ㅇ 본 과업지시서의 용어해석상에 차이가 있을 경우에는 감독원과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

ㅇ 기타 사항은 관계규정이 정하는 바에 따라 감독원과 협의 조정하되, 조정이 되지 않을 경우 감독원의 지시를 따르도록 한다.

성과품

보고

ㅇ 착수 및 최종보고

- 과업 착수일로부터 14일 이내에 발주처와 협의를 통해 착수보고를 진행하며, 최종 연구결과를 작성하여 과업종료 14일전에 보고하여야 한다.

ㅇ 수시보고

- 본 과업의 추진상황이나 연구결과에 대하여 발주기관의 요구가 있을 때에는 수시로 보고한다.

- 보고시기, 보고내용, 보고방법 등에 대해서는 발주처와 협의하여 결정하도록 한다.

성과품 제출

ㅇ 과업성과품

- 최종보고서 : 과업 종료 시

- 과업성과품 규격 및 수량

- 최종보고서 : 5부(A4), 외장하드 1식

* 현황분석 도면화 작업과정 등에서 산출된 Raw Data 포함

ㅇ 모든 성과품의 작성은 사전에 발주기관과 협의하여 작성한다.

ㅇ 상기 성과품과는 별도로 준공시 재무회계팀에 최종보고서 2부, CD 1매를 제출하여야 한다.

예정공정표

<용역명> 대전 도심융합특구 현황·산업분석과 공간·사업구상 지원

기간(년/월) 세부내용	`22	`22
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 대전시 도심융합특구 관련 여건 분석
2. 대상지 현황 및 여건 공간 분석
3. 기본구상 및 세부 계획, 거점별 추진 전략 지원
4. 특화전략 및 핵심사업 구상 지원
5. 사업비 및 소요예산 분석
보고	★ 착수									★ 최종