군위군 첨단산업단지 조성 사업 타당성 조사 연구용역

위탁용역 시행계획

1. 위탁용역 개요

ㅇ (위탁명)「군위군 첨단산업단지 조성 사업 타당성 조사 -입지선정 및 개발구상안 기술부문-」

ㅇ (위탁기간) 계약일로부터 8개월

ㅇ (위탁비용) ￦ 120,000,000 (일금 일억이천만원 정, V.A.T. 포함)

ㅇ (위탁방법) 협상에 의한 계약

ㅇ (예산과목) 군위군 첨단산업단지 / 외부용역비 및 부담금

2. 위탁용역 사유

ㅇ 군위군 신공항입지 및 대구시 편입에 따른 여건변화에 따라 공항과 연계된 산업기능 입지를 통해 산업발전을 이끌 수 있는 혁신거점 조성을 위해 종합적인 청사진 마련 필요

ㅇ 본 과업은 군위군 첨단산업단지의 최적의 후보지를 선정하여 체계적이고 효율적 조성을 위한 기본방향 정립을 통해 향후 정책반영 및 국토교통부 등 대외업무 협의시 선제적 대응전략을 마련하기 위함

ㅇ 위탁용역 범위는 개발수요 분석, 산업단지 후보지 입지선정, 개발구상 및 사업성 분석 등으로 함

3. 위탁용역 내용

ㅇ 개발수요 분석

- 대구광역시와 군위군 산업입지 수요전망

- 대구광역시를 비롯한 주변지역 기업체 수요조사

- 수요 분석 결과의 종합

ㅇ 개발규모 및 입지선정

- 입지후보지 선정 기준 마련

- 입지후보지별 현황분석

- 입지후보지 대안 평가 및 입지선정

- 개발규모 설정

ㅇ 군위군 첨단산업단지 개발구상(안) 작성

- 기본구상 작성

- 토지이용계획 수립

- 부문별 계획 수립

ㅇ 사업성 분석

- 단지 조성비 추정

- 사업성 검토

- 단계별 추진전략 수립

4. 추진방법

ㅇ (협상에 의한 계약) 복수의 업체(기관)로부터 연구제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 연구원에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결

* '위탁연구사업규칙' 제2장 제3조 4

5. 추진일정

ㅇ 2022. 09. 23(금) : 공고 및 제안서 접수

ㅇ 2022. 10. 05(수) : 제안서 접수마감

ㅇ 2022. 10. 12(수) : 제안서 평가 및 위탁자 선정

ㅇ 협상 후 계약체결

※ 일정은 추후 상황에 따라 변경될 수 있음